문서번호	급수운영과-28173
결재일자	2015.12.16.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
전성호		代전성호	12/16 장종욱
협 조	주무관			이동열
	주무관			김기문
	주무관			강정구
	주무관			노운학
	주무관			김병주

〔2015년 서부수도 관내 포장도로 굴착복구공사〕

기   성   보   고   서 (3차정산)

2015. 12

2015년 서부수도 관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속단가계약) 수급인 (주)해슬이앤씨에서 정산요청서가 접수되어 아래와 같이 기성(3차정산)을 시행코자 합니다.

2015 .  12.  .

보고자 :  직 지방시설주사보  성명 : 전성호

서부수도사업소장 귀하

제목 : 기성(3차)보고 〔2015년 서부수도 관내 포장도로 굴복구공사(장기계속단가계약)〕

1. 공사현황

가. 공 사 명 : 2015년 서부수도 관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속단가계약)

나. 계약상대자 : (주)해슬이애앤씨 대표 고현문

다. 총부기 계약금액 : 금일십일억육천사백육십팔만삼천육백원정(1,164,683,600)

라. 총부기 계약기간 : 2015.05.11 ~ 2016.05.31

마. 금회정산금액 : 금사억팔천삼백사십삼만구천원(483,439,000)

2, 정산현황

가. 정산기간 : 2015.  09.01 ~ 2015. 11. 30

나. 기성물량 : 아스팔트포장 외 3공종 167.01a

다. 공사위치 : 서부수도 관내(마포,서대문,은평구)

라. 정산내역                                                           (단위 :  원)

계 약 금 액		지 출 금 액			잔 액	비고
총부기금액	1차수 계약금액	전회까지 누계	금회지출	지출 누계
1,164,683,600	815,278,000	616,825,000	483,439,000	1,100,264,000	64,419,600

라. 금회정산내역                                                       (단위 :  원)

구 분	총 계	비 고
금회정산금액	483,439,000
기지급노무비	75,031,000	2015년 9,10,11월분
금회추산금액	408,408,000

마. 금회 정산 세부 내역                                            (단위 : 천원)

구분	사 업 명	계	신 설 공사비	시 설 비					수선비		소방비
				송배 수관	배급수관망	배급 수관	밸브유지 관리	전식 방지	긴급 누수	불용관	신설	보수
계		408,408	119,460	51,282	31,856	120,879	10,890	16,709	56,056		869	407
단가 계 약	신공덕동외6개동상수도공사		14,267			24,431
	홍제1동외13개동상수도공사		33,011		13,904	16,797					88
	서강동외7개동 상수도공사		26,642			9,449
	은평구관내상수도공사		45,540		17,952	4,510					781
	대조동외6개동 상수도공사
	역촌동외8개동 상수도공사
	은평구 긴급누수복구(수선비)								33,836			407
	마포구 긴급누수복구(수선비)								15,147
	서대문구 긴급누수복구(수선비)								7,073
	은평구 관내 상수도시설물 및 소화전설치보수공사(제.퇴수변)						7,898
	마포구 관내 상수도시설물 및 소화전설치보수공사(제.퇴수변)						1,254
	서대문구 관내 상수도시설물 및 소화전설치보수공사(제.퇴수변)						1,738
	은평구 관내 상수도시설물 및 소화전설치 보수공사(소화전)
	마포구 관내 상수도시설물 및 소화전설치 보수공사(소화전)
	서대문구 관내 상수도시설물 및 소화전설치수공사(소화전)
단일공사	동교동삼거리 ~ 합정역간 송배수관정비공사			4,282
	응암역~와산교간 송배수관 정비공사			47,000
	응암오거리~충암고등학교간 송배수관 정비공사
	북가좌동 273-12호외4개소 배급수관 정비공사					2,244
	서교동 343-10외2개소 배급수관 정비공사					15,213
	불광동 310번지외5개소 배급수관 정비공사					28,666
	녹번동 117번지외2개소 배급수관 정비공사					19,569
	역촌동 62-27외 1개소 전식방지 공사							16,709

※ 서교동 343-10외2개소 배급수관 정비공사 포장복구비 90,244,000원중 75,031,000원 기노무비 지출됨

바. 예산과목 및 정산액 (계:408,408,000)

- 상수도사업비용, 영업비용, 급수공사비, 신설공사비 (119,460,000) -신설비

- 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 (51,282,000) -노후송배수관정비

- 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비 (120,879,000) -배급수관

- 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비 (16,709,000) -전식방지

- 자본적지출, 가동설비자산, 구축물, 시설비 (31,856,000) -소불록배급수관망

- 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비 (10,890,000) -노후밸브정비

- 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선교체비,기타교체비 (56,056,000) -긴급누수

- 소방용수시설설치,소방용수시등의설치및관리,소방용수시설설치.시설비 (869,,000) -소하전신설

- 소방용수시설설치,소방용수시등의설치및관리,소방용수시설보수.시설비 (407,000) -소하전보수

3, 조치의견

○ 현장 시공상태 및 물량내역등을 확인결과 적정함으로 상기와 같이 기성(정산) 처리

코자합니다.

따로붙임 :  정산 설계서 1부.  끝.