문서번호	방재시설부-17066
결재일자	2015.12.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
송민영		이도헌	12/16 임춘근
협 조

설계변경(총차 1회, 1차 1회)검토보고

탄천 복개 공원화공사(4단계) 건설폐기물처리용역

2015. 12.

도시기반시설본부

방재시설부

설계변경(총차 1회, 1차 1회) 검토보고

(탄천물재생센터 복개공원화공사(4단계) 책임감리용역)

『탄천물재생센터 복개공원화(4단계)공사 건설폐기물 처리용역』관련 본 공사 설계변경에 따른 건설폐기물 처리물량 반영에 대한 설계변경 검토 보고임.

□ 관련근거

○ ㈜유신 감리15-1533호(2015.12.15) : 건설폐기물 처리용역 설계변경 내역제출(총차 1회, 1차 1회)

□ 용역개요

○ 위    치 : 강남구 개포로 625 (탄천물재생센타 내)

○ 규    모 : 폐콘 2,763㎥, 폐아스콘 329㎥, 건폐 5㎥, 혼폐 8㎥

○ 용역기간 : ´14.3.18~´16.9.29(1차 : ´14.3.18.~´15.12.30)

○ 용 역 비 : 90,653천원(1차 : 62,247천원)

○ 용 역 사 : ㈜도성개발 외1

□ 금액변경 내용

○ 전체 1회

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	비 고
용 역 비	90,653	98,088	증) 7,435
계약기간	2014.3.18 ~ 2016.9.29	2014.3.18 ~ 2016.9.29	변경 없음

○ 1차 1회

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	비 고
용 역 비	62,247	62,247	변경 없음
계약기간	2014.3.18 ~ 2015.12.30	2014.3.18 ~ 2015.12.30	변경 없음

□ 물량변경 내용

○ 전체분 물량변경

공 종		단위	수 량			공사비(천원)
			당초	변경	증·감	당초	변경	증·감
폐기물운반 (중간처리)		T O N	3,105	3,362	증) 257	32,000	34,648	증) 2,649
폐기물처리	폐아스콘		329	322	감) 7	5,728	5,606	감) 121
	폐콘크리트		2,744	2,970	증) 226	43,978	47,600	증) 3,622
	보도블럭		19	57	증) 38	305	914	증) 609
	건설폐재류		5	5	-	122	122	-
	혼합폐기물		8	8	-	281	281	-
공급가액						82,411	89,171	증) 6,759
부가세						8,241	8,917	증) 676
도급액						90,653	98,088	증) 7,435

○ 1차분 물량변경

		단위	수 량			공사비(천원)
			당초	변경	증·감	당초	변경	증·감
폐기물운반 (중간처리)		T O N	2,135	2,140	증) 5	22,003	22,055	증) 52
폐기물처리	폐아스콘		183	90	감) 93	3,186	1,567	감) 1,619
	폐콘크리트		1,932	2,016	증) 80	30,964	32,310	증) 1,346
	보도블럭		14	28	증) 18	224	448	증) 224
	건설폐재류		-	-	-	-	-	-
	혼합폐기물		6	6	-	211	211	-
공급가액						56,588	56,588	-
부가세						5,659	5,659	-
도급액						62,247	62,247	-

□ 설계변경 사유

○ 본 공사 콘크리트 깨기 등 설계변경 반영에 따른 건설폐기물 물량변경

□ 책임감리 검토의견

○ 본 공사 실정보고사항중 건설폐기물처리용역 해당 부분을 반영하였고, 1차분 변경 내용은 현재까지 운반 및 처리수량을 적용하여 정산하여 적정하게 작성됨.

□ 조치의견

○ 상기와 같이 본공사 설계변경에 따른 실처리 수량을 정산하는 사항으로 설계에 반영하여 건설폐기물처리 업무에 만전을 기하고자 함.

따로붙임 : 1. 건설폐기물 처리용역 설계변경 요청 공문 1부.

2. 설계변경 내역서(총차 1회, 1차 1회) 각 1부.    끝.