문서번호	교량안전과-7013
결재일자	2015.12.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		특수교량팀장	교량안전과장
우창원		이수근	12/16 代하현석
협조

설계변경 승인 검토보고[동호대교 기초구조물(우물통)보수공사]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 12.

안전총괄본부

(교량안전과)

설계변경 승인 검토 보고

[동호대교 기초구조물(우물통)보수공사]

『동호대교 기초구조물(우물통)보수공사』시행과 관련 한강교량일상유지보수공사 전면책임감리용역사로 부터 설계변경 보고서가 제출되어 설계변경 승인 검토 보고 사항임

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 동호대교 기초구조물(우물통) 보수공사-2차

○ 공사기간 : 2015.03.02. ~ 2015.12.31.

○ 공사금액(전체분) : 6,444,547,200원

(도급비 6,111,016,870원, 관급비 145,162,000원,

이설비 188,368,330원)

○ 공사금액(2차분) : 4,651,000,000원

(도급비 4,357,185,870원, 관급비 121,097,540원,

이설비 172,716,590원)

○ 시  공  사 : (주)오래건설

○ 감  리  사 : ㈜대한콘설탄트외 1개사

○ 공 사 개 요(2차분)

- 가물막이 19기, 단면확대(건식) 24기, 단면확대(습식) 4기,

열화부제거 및 단면보수 75㎡

□ 설계변경 검토 보고

○ 실정보고 및 현안사항에 대한 설계변경 내용

1) 남단 가물막이구간 퇴적토로 인한 작업공간이 부족하여 퇴적토             터파기 및 되메우기 반영

2) 당초 발주시 이전비로 산출된 유류비를 도급내역에 반영

3) 우물통 가물막이 추가 시공

4) 우물통 단면복구 및 균열보수 시공물량 변경

5) 제경비(건강보험료, 고용보험료, 노인장기고용보험료, 퇴직공제비,

안전관리비, 환경보전비) 등 정산

6) 관급비(아스콘) 및 이전비 정산등

○ 주요 설계변경 내역

연번	설계변경내용	공사비(천원)	비 고
1	가물막이공 □우물통보수 3기 추가	증)169,799
2	앵커철근단면확대공 □우물통보수 3기 추가로 물량증가	증)48,952
3	- 우물통 기초보수보강 □우물통 부분보수 시공물량 변경	감)20,400
4	부대공 □유류비 및 접안시설 반영	증)144,211
5	수중터파기 및 되메우기 □작업공간 확보	증)144,699
6	- 기타 물량 변경 및 제경비 정산	감)30,288
공사비계		증)456,973

□ 공사비 증ㆍ감현황

○ 공사비 변경내역

구 분	당 초(원)	변 경(원)	증ㆍ감(원)
1.가물막이공	1,238,403,717	1,408,202,274	(증)169,798,557
2.앵커철근단면확대공	477,078,618	526,030,246	(증)48,951,628
3.하이브리드공	127,712,274	127,712,274
4.FRP특수틀보강공	381,163,484	381,163,484
5.우물통기초보수.보강공	143,168,372	122,768,427	(감)20,399,945
6.부대공	345,581,452	489,792,648	(증)144,211,196
7.수중터파기및되메우기	0	144,699,364	(증)144,699,364

구 분	당 초(원)	변 경(원)	증ㆍ감(원)
직접 공사비	2,713,107,917	3,200,368,717	(증)487,260,800
제경비	1,644,077,953	1,613,790,283	(감)30,287,670
도급액	4,357,185,870	4,814,159,000	(증)456,973,130
관급비	121,097,540	115,065,770	(감)6,031,770
이전비	172,716,590	0	(감)172,716,590
공사비 계	4,651,000,000	4,929,224,770	(증)278,224,770

□ 검토결과 처리계획

○ 기 실정보고에 대한 설계변경 보고내용을 검토한 바, 수량 및 공사비 산출내역이 적정한 것으로 사료되어, 상기사항과 같이 설계변경 시행코자 합니다.

붙임 : 설계변경보고서 관련 제출공문 1부.(별도) 끝.