문서번호	시설관리과-38070
결재일자	2015.12.16.
공개여부	부분공개
방침번호

		시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
이생기	채재일	12/16 나태산

공사 실정보고

(종로2가40~관수동149번지외 1개소)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.12

중부수도사업소

(시설관리과)

공사 실정 보고

우리사업소에서 시행중인 『종로2가40~관수동149번지간 송배수관정비공사』와 관련하여 감독기관인 시설관리공단으로부터 공사실정 보고서가 접수되어 검토내용 및 검토 및 조치사항을 아래와 같이 보고합니다.

※ 공사감독2처-20411(2015.12.16)호

1		공사현황

가. 공 사 명：종로2가40~관수동149번지간 송배수관정비공사

나. 공사기간：2015. 9. 21. ∼ 2015. 12. 23.

다. 도 급 비：금302,401,504원

라. 공사개요 : D=200~500mm, L=380m

***************************

바. 감 독 청：시설관리공단(감독 장진우)

2		공단 보고내용

1) 현황 및 문제점

- 당초 설계에는 A-1 도로로 아스콘 포장두께가 T=20cm로 설계되어 있으나, 굴착           결과  대부분의 아스콘 포장두께가 T=40cm 이상으로 실측된 실정 임.

2) 검토 의견

- 아스콘 포장 두께가 40cm 이상으로 실측된 전구간 L=380m에 대하여는 실측          된 포장두께를 적용하여 공사장 관리에 만전을 기하고자 하며, 추후 설계변경          정산 처리코자 합니다.

- ASP 폐기물 발생량 : 증) 약200㎥

3		검토 및 조치의견

가. 공사 실정보고 검토내용

- 위 실정보고와 같이 아스콘 포장 두께가 40cm 이상으로 실측된 전구간             L=380m 에 대하여는 실측된 포장두께를 적용토록하고 변경되는 물량이 발생         되는 실정으로 설계 반영 필요.

나. 상기 사항을 시설관리공단에 통보하여 설계변경시 반영토록 하여 시공에 만전을

기하고자 함.

별  첨 : 공사 실정보고서 1부. 끝.