문서번호	의정담당관-13480
결재일자	2015.12.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	의정담당관
김병용	이문주	12/16 정광현
협 조

FCU(휀코일유닛)구매 규격변경 보고

2015. 12

서울시의회사무처

(의정담당관)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

FCU(휀코일유닛)구매 규격변경 보고

조달 구매중인 FCU(휀코일유닛)장비의 규격이상으로 장비사양등 변경 계약을 진행하고자 보고드림

1	변경 현황

❍ 장비사양

구분	당초		변경		비고
	규격	수량	규격	수량
본관	30T	33	20T	11
	40T	73	30T	20
	60T	27	40T	81
	80T	4	60T	25
의원회관	40T	6	30T	5
	60T	8	40T	9
	40TM	100	30TM	100
	60TM	12	40TM	12
계		263		263

❍ 소요예산 : 당초49,605천원 ⇒ 변경46,820천원(감 2,785천원)

2	변경사유

❍ 장비 사양 대비 외부 규격상이 : 업체간 규격차이

❍ 장비 커버 및 내부 설치 환경 감안(의원회관 전체) ⇒ 재실측

3	향후일정

❍ 2015. 12. 17 : 변경계약

❍ 2015. 12. 30 : 장비납품. 끝.