문서번호	기전과-12762
결재일자	2015.12.16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	기전과장	북부도로사업소장
강운규	이영목	12/16 노영석

「2015년 교통안전시설물(안전표지) 유지보수공사(연간단가)」

설계변경보고(제5차)

2015. 12

북부도로사업소

기전과

「2015년 교통안전시설물(안전표지) 유지보수공사(연간단가)」

설계변경보고(제5차)

우리사업소에서 시행중인『2015년 교통안전시설(안전표지) 유지보수공사(연간단가)』에 대해 감리사로부터 설계변경(제5차)보고 접수되어 이를 검토하고 보고함.

관련근거

2015. 12. 16. 2015년 교통안전시설물(안전표지) 유지보수공사(연간단가)  - 감리사 제5차 설계변경 제출

사업개요

사 업 명 : 2015년 교통안전시설물(안전표지) 유지보수공사(연간단가)

시 공 사 : ***********

공사기간 : 2015. 3. 30 ~ 2015. 12. 31

공사금액 : 금67,444,000원

설계변경 내용

설계변경 사유

- 연간단가 공사의 특성상 추정물량을 산정하여 공사를 추진함에 따라 당초설계물량과 실작업물량과의 차이로 인한 물량변동 발생

- 교통안전표지 신설외 2개공종 물량변동(증:2,감:18)

설계변경 금액

(단위:원)

구 분	변경 전	변경 후	증 감		비 고
총 공 사 비	67,444,000	64,634,000	- 2,810,000	(감)
공 급 가 액	61,312,727	58,758,182	- 2,554,545	(감)
부가가치세	6,131,273	5,875,818	- 255,455	(감)

검토의견 및 조치계획

위와 같이 접수된 감리사의 설계변경(제5차)에 대해 검토한 결과 적합하여 승인 처리코자 합니다.

붙임 : 1. 감리사 설계변경 요청 공문 1부.

2. 변경내역서 1부. 끝.