문서번호	급수설비과-9386
결재일자	2015.12.16.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		급수설비과장	급수부장
이재학		김기상	12/16 이규상
협조

-상수도공사(급수,누수,시설물) 강북지역 건설사업관리용역-

설계변경 소심의위원회 개최

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 12.

상수도사업본부

(급수설비과)

-상수도공사(급수,누수,시설물) 강북지역 건설사업관리용역-

설계변경 소심의위원회 개최

본부에서 시행중인『상수도공사(급수,누수복구,시설물) 강북지역 건설사업관리용역』업무 수행 중 설계변경 사유가 발생하여 설계변경 소심의위원회를 개최ㆍ심의하고 그 결과를 반영하여 설계변경 절차를 이행하고자 함.

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 상수도공사(급수,누수복구,시설물) 강북지역 건설사업관리용역(장기계속)

○ 용역기간 : 2015. 6.22.~2017. 6.21.

○ 계약금액 : 금4,888,436,000원

○ 용역개요 : 급수공사 및 인입관 철거 ․ 폐쇄(포장복구 포함)  18,980건

누수복구공사(포장복구 포함) 19,836건, 시설물공사 : 6,076건

기타(동결, 시설공사, 민원처리 등) 사업소장 지시사항 1식

○ 계약상대자 : ㈜이준엔지니어링 대표 이방열외 2개사

○ 용역비 및 용역기간

(단위: 원)

구 분	용 역 비	용역기간	비 고
총차 계약금액	4,888,436,000	2015. 6.22.~2017. 6.21.
1차수 계약금액	1,426,579,000	2015. 6.22.~2015.12.31.
2차수 계약금액	2,444,431,000	2016. 1. 1.~2016.12.31.
3차수 계약금액	1,017,426,000	2017. 1. 1.~2017. 6.21.

□ 설계변경 소심의위원회 개최

○ 소위원회 구성 운영

- 일    시 : 2015. 12.17 (목)  16:00~17:00

- 장    소 : 급수부 회의실(4층)

- 심의건명 : 상수도공사 건설사업관리용역 설계변경 심의건

‧ 총 용역비 계약금액 변경없이 차수별 증감 내역 조정

(1차분 감액분→3차분 증액 반영)

구 분	당 초	변 경	증ㆍ감	비 고
총 계약금액	4,888,436,000	4,888,436,000	-
1차 계약금액	1,426,579,000	1,223,277,000	감)203,302,000원
2차 계약금액	2,444,431,000	2,444,431,000	-
3차 계약금액	1,017,426,000	1,220,728,000	증)203,302,000원

- 소심의위원회 구성

‧ 위원장 : 급수설비과장

‧ 위   원 : 시설안전부 주무관 이태형, 주무관 성기옥

급수부    주무관 김원수, 주무관 권오정

‧ 간  사 : 주무관 이재학

붙임 : 1) 설계변경 내역서 1부.

2) 설계변경 심의의결서 1부.

3) 설계변경 설명서 1부(별도). 끝.