문서번호	정수과-5417
결재일자	2015.12.16.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	소장
김인구		윤맹진	12/16 유성종
협조

2015년 배출수처리시설 운영관리 용역 1차년도 보험료 정산에 따른 설계변경 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 12.

2015년 배출수처리시설 운영관리 용역 1차년도 보험료 정산에 따른 설계변경 보고

우리 아리수정수센터 배출수처리시설 운영관리 용역(장기계속계약) 1차년도

계약기간이 만료되어 보험료(국민연금, 국민건강, 노인장기요양) 정산에 따른 계약금액을 설계변경하고 2차년도 차수계약 의뢰하고자 합니다.

계약현황

건    명 : 암사 배출수처리시설 운영관리 용역

계약업체 : 태일환경관리(주)

계약기간 : 2015. 9. 1 - 2018. 8. 31(3년)

총용역부기금액 : ￦917,961,000원

계약인원 : 현장소장 1인, 운전요원 5인

변경 계약현황

계약변경 금액내역

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 감	비 고
총용역부기금액		917,961,000	917,598,000	감363,000
차수별	1차년도 (`15.9.01-12.31)	101,992,000	101,629,000	감363,000
	2차년도 (`16.1.01-12.31)	305,987,000	-	-
	3차년도 (`17.1.01-8.31)	305,987,000	-	-
	4차년도 (`18.1.01-8.31)	203,995,000	-	-

1차년도 보험료 정산금액

(단위 : 원)

구분	계	건강보험 (보험요율:2.945%)	국민연금 (보험요율:4.5%)	노인장기요양 (보험요율:6.55%)
당 초	5,224,244	2,050,168	3,039,796	134,280
변 경	4,974,520	1,952,440	2,894,360	127,720
차액	-249,724	-97,728	-145,436	-6,560

보고자 의견

1차년도 계약기간(`15. 9. 1 – 12.31)이 만료 됨에 따라, 배출수처리시설 운영관리 용역     보험료(국민연금, 국민건강, 노인장기요양)를 정산하고 1차년도 12월(4회차) 기성금         25,1350,000원을   설계변경 후 지급하고, 보험료 정산금액 조정에 따른 설계변경과 2차년도       차수계약을 본청 재무과에  의뢰코저 합니다.

붙 임 : 1. 합의서 1부.

2. 변경계약 설계서(‘15년) 1부.

3. 정산내역서(‘15년) 1부.  끝.