문서번호	교통운영과-24586
결재일자	2015.12.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교통시설팀장	교통운영과장
최기문		최정규	12/16 강진동
협조

- 2015년 교통안전시설 설치공사 -

건설사업관리 용역 설계변경(정산) 보고

2015. 12.

- 2015년 교통안전시설 설치공사 -

건설사업관리 용역 설계변경(정산) 보고

2015년 교통안전시설 설치공사 건설사업관리 용역(강북,강남)관련 출납폐쇄기간 단축에 따른 사업기간 및 감리원수 등 변동에 따른 설계변경(정산) 보고임.

용역 개요

용 역 명 : 교통안전시설 설치공사 건설사업관리 용역(강북,강남)

계약기간 :

*****	*******	****	*** *****	****
교통안전시설물 설치공사 건설사업관리 용역(강북)	㈜영호이앤씨 서태교	123,077,000원	2015.3.12 (2015.3.13)	2015.3.12 ~ 2015.12.31
교통안전시설물 설치공사 건설사업관리 용역(강남)	㈜트래픽스 김희수	124,864,200원	2015.3.13 (2015.3.13)	2015.3.13 ~ 2015.12.31

설계변경 내용

용역기간 조정 : 2015년회계 출납폐쇄기간 단축에 따른 용역기간 조정

- 당 초 : ‘15.3.13 ~ ’15.12.31일

- 변 경 : ‘15.3.13 ~ ’15.12.21일

계약금액 변경 : 용역기간 및 건설사업관리원 투입인원 조정에 따른 금액 정산

- 강북지역

▪ 당  초 : 중급기술자 83일, 초급기술자 217일

▪ 변  경 : 중급기술자 72일, 초급기술자 192일

- 강남지역

▪ 당  초 : 중급기술자 83일, 초급기술자 217일

▪ 변  경 : 중급기술자 72일, 초급기술자 192일

설계변경 내역

(단위:원)

지 역	당 초	변 경	증 감	비 고
강 북	123,077,000	109,528,900	감)13,548,100
강 남	124,864,200	111,120,000	감)13,744,200

조치 계획

상기 사항에 대해 설계변경(정산)을 시행하고자 함.

붙임 : 교통안전시설 설치공사 건설사업관리 용역(강북,강남) 설계변경 내역서 각 1부. 끝.