투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	2015년 한강공원 나들목 감시장치 유지관리 용역 설계변경(정산) 시행 및 계약의뢰

1. 기전설비과-2199(2015. 12. 15.)호와 관련입니다.

2. 우리본부에서 시행중인 『한강공원 나들목 감시장치 유지관리 용역』에 대하여 내역 변경이 있어 아래와 같이 설계변경(정산) 시행 및 계약의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 2015년 한강공원 나들목 감시장치 유지관리 용역

나. 용역기간 : 2015. 3. 11 ~ 12. 31.

다. 용역업체 : ***************

라. 계약금액 : ************

마. 설계변경 사유

- 점검 및 정비 추진과정 중 신규 품목 및 물량 변동 발생으로 수량 조정

▪ CCD COLOR CAMERA 등 11품목 수량 감소

▪ N.V.R 수리 등 3품목 수량 증가

▪ SPEED DOME CAMERA 등 12품목 신규 물량 추가

- 노무비 변경(감소)에 따른 보험료 조정(정산)

보 험 종 류	적 용 조 건	단위	수 량		비고
			변경 전	변경 후
산재보험료	노무비의 3.8%	원	1,848,321	1,819,844	28,477(감)
고용보험료	노무비의 0.87%	원	423,168	416,648	6,520(감)
건강보험료	직노무비의 1.7%	원	858,580	740,801	117,779(감)
연금보험료	직노무비의 2.49%	원	1,257,567	1,085,056	172,511(감)

바. 설계변경 금액                                      [단위 : 원]

구 분		변경 전	변경 후	증·감	비 고
용역비	공급가액	85,243,557원	85,243,555원	2원(감)	원단위 절사
	부가세	8,524,356원	8,524,356원	0
	합계	93,767,910원	93,767,910원	0

※ 최종 준공금은 준공검사 후 12월 말에 지급 예정

사. 예산과목 : 한강공원 관리 및 운영, 한강공원 관리 및 개선, 한강공원 접근시설 유지관리, 공공운영비

붙임. 1. 설계변경 보고서 1부

2. 설계변경 내역서(갑) 1부

3. 설계변경 내역서 1부

4. 제비율 검증 1부

5. 합의각서(감시장치) 1부

5. 보험료(산재, 고용, 건강, 연금) 납입 증명서 각 1부. 끝.

	기전설비과장
주무관	이학수		기전설비과장	12/16 김남수
협조자
시행	기전설비과-2212	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257	/
전화	02-3780-0673	/전송	02-0780-0744	/		/	부분공개