문서번호	물재생과-8464
결재일자	2015.12.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장	중랑물재생센터소장
최승룡		강병수	12/16 김동기
협조
	치수관리팀장		지승현

『한강변(강북) 노후차집관로 정비공사』

준공기한 연기 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.12.

중랑물재생센터

(물재생과)

『한강변(강북) 노후차집관로 정비공사』

준공기한 연기 검토보고

우리센터에서 추진중인 『한강변(강북) 노후차집관로 정비공사』가 잦은 우천과  동절기 폭설 및 혹한에 따른 절대공기 부족으로 인해 준공기한 연기에 관한 검토 보고임

1		사업개요

□ 사 업 명 : 한강변(강북) 노후차집관로 정비공사

□ 사업기간 : ‘15.11.18 ~ ’15.12.31

□ 사 업 비 : 744,318천원

□ 도 급 자 : ㈜대근토건 대표 김병호

□ 공사내용

- 비굴착보수 D=1,200mm, L=780m

- 신축이음부 보수 202m

2		보고내용

□ 본 공사 추진기간중 우천으로 인한 공사중단 일수가 16일로 사업기간내 공사를      완료할 수 없는 실정 임

□ 또한, 엘리뇨 현상으로 금번 겨울은 잦은 한파와 폭설이 예상된다는 기상청      예보가 있음

3		조치의견

□ 우천이나 폭설시 안전사고의 위험이 있어 아래와 같이 준공기한을 연기하여      사업추진에 만전을 기하고자 함

□ 준공기한 연기

- 당초 : ‘15. 11. 18 ~’15. 12. 31

- 변경 : ‘15. 11. 18 ~’16. 03. 31

4		행정사항

□ 본 사업은 재난관리기금으로 시행하는 사업으로 ‘16년 상반기에 재난관리기금 재     심의를 득하여 예산 집행

붙임 : 기상청 날씨현황 1부. 끝.