문서번호	도로보수과-5706
결재일자	2015.12.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	성동도로사업소장
김용면		국중진	12/16 代국중진
협조	주무관		홍수종
	주무관		하승환

2015년 폐아스콘 운반 및 처리용역(2구역) 설계변경(2차 최종정산) 검토 보고

2015. 12.

2015년 폐아스콘 운반 및 처리용역(2구역)

설 계 변 경(2차 최종정산) 검 토 보 고

노후포장도로 및 굴착복구공사 폐아스콘 발생 물량변경에 대한 설계변경사항 검토보고임.

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2015년 폐아스콘 운반 및 처리용역(2구역)

○ 규    모 : 폐아스콘 운반 및 처리 27,724톤

○ 계약금액 : 금303,820,000원

○ 계 약 자 : 운반-(주)신명 대표 백지애, 처리-(주)현대아스콘 대표 박삼순

○ 용역기간 : 2015. 4. 06. ~ 2015.12. 31.

○ 공 정 률 : 100%

□ 변경사유

○ 폐아스콘 발생량 변경

- 노후포장도로(2구역) 정비공사 당초 계획물량 감소

- 굴착복구공사(연간단가) 당초 계획물량 감소

□ 변경내용

○ 공종별 수량

공 종	규 격	단위	수 량			비 고
			당 초	변 경	증 ․ 감
폐기물 운반 및 처리	왕복, 야간	톤	27,724	27,393	감)331

○ 도급비

공 종		금 액(원)			비 고
		당 초	변 경	증·감
총 용 역 비		303,820,000	300,190,000	감) 3,630,000
도급비	공급가액	276,200,000	272,900,000	감) 3,300,000
	부가가치세	27,620,000	27,290,000	감) 330,000
	계	303,820,000	300,190,000	감) 3,630,000

□ 조치계획

○ 당초 계약물량이 감소됨에 따라 공종별 변경 물량에 대하여 설계변경 시행코자 함.

첨  부 : 변경내역서 및 반출내역 각 1부. 끝.