함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행 ( 2015년 대현산 배수지외 4개소 항 청소 용역)

우리사업소에서 시행중인 「2015년 대현산 배수지외 4개소 항 청소 용역」에 대하여 설계  변경 사전 심의를 마치고 아래과 같이 설계변경을 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2015년 대현산 배수지외 4개소 항 청소 용역

나. 도 급 자 : *******************

다. 계약기간 : 2015.04.20. ~ 2015.12.20

라. 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선유지교체비,기타교체비(물탱크청소)

마. 설계변경사유: 신규내역 발생 및 제경비 정산에 따른 변동

마. 설계변경 내역

단위:원

구분		당초	변경	증감
총용역비		246,424,900	228,567,900	-17,857,000
도급비	공급가액	224,022,637	207,789,000	-16,233,637
	부가가치세	22,402,263	20,778,900	-1,623,363
	계	246,424,900	228,567,900	-17,857,000

따로븥임 1. 설계변경 내역서1부.

2. 변경합의서 및 심의 의견서 각 1부.   끝.

주무관	장병철		급수설비팀장	代양윤선		급수운영과장	최명익		동부수도사업소장	12/16 홍현구
협조자	주무관	노은영		행정관리팀장	代김성택
시행	급수운영과-33766	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	(02)3146-2870	/전송	(02)3146-2789	/	beoul-50312@seoul.go.kr	/	부분공개