투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	감리용역 설계변경 및 준공기한 연기 의뢰(서빙고)

우리본부에서 시행중인『서빙고고가교 및 강변북로 연결로 개선공사 전면책임 감리용역』과관련하여 아래와 같이 설계변경(총괄7회,5차회) 및 준공기한 연기 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 서빙고고가교 및 강변북로 연결로 개선공사 전면책임 감리용역

나. 용역기간 : 총괄-2010.12.31.~ 2016.1.31.(5차-2015.1.15. ~ 2016.1.31.)

다. 용 역 비 : 총괄-2,003,800천원          (5차-549,100천원)

라. 용 역 사 : ㈜한국종합기술 외 1개사

마. 예산과목 : 도시개발특별회계, 도로계획과, 도로건설, 간선도로망확충,                            서빙고고가교및강변북로연결로개선, 시설비및부대비, 감리비

바. 용역비 및 준공기한 연기내용                                  (단위:원)

구 분		총 괄	5 차	비고
변 경 계약금액	당 초	2,003,800,000	549,100,000
	변 경	2,003,260,000	426,400,000
	증.감액	감 540,000	감 122,700,000
변 경 계약기간	당 초	2010.12.31.~2016.1.31	2015.1.15.~2016.1.31.
	변 경	2010.12.31.~2016.5.30	2015.1.15.~2015.12.31

사. 준공기한 연기사유

- 시설공사 준공기한 연기에 따른 본 용역 준공기한 연기

아. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙  임 : 1) 보고서 1부

2) 합의각서 1부

3) 내역서 각1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	홍상필		터널건설과장	권혁대		토목부장	12/16 代서관석
협조자	계약2팀장	홍연화
시행	토목부-27153	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화		/전송	02-3708-2599	/		/	대시민공개