투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	치유숲길 조성공사 설계변경 시행

우리대공원 『치유숲길 조성공사』 추진과 관련 아래와 같이 설계변경 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 서울대공원 치유숲길 조성공사

나. 공사내용 : 숲길 정비, 치유공간 조성, 수목식재 등

다. 공사기간 : 2015. 10. 16 ~ 2015. 12. 24

라. 도 급 액 : 340,837,900원

마. 도 급 사 : ㈜고려원조경 이수희

바. 변경내역

구 분		금 액		증 감
		당 초	변 경
총공사비		429,791,900	436,224,000	6,432,100
도급액	공급가액	309,852,636	315,700,000	5,847,364
	부가가치세	30,985,264	31,570,000	584,736
	계	340,837,900	347,270,000	6,432,100
관급자재비		88,954,000	88,954,000	0

사. 예산과목 : 푸른도시국자연생태과, 생태계복원및보전과야생동식물보호, 생태계보전사업, 치유의숲 조성, 시설비및부대비(시설비) - 시 재배정

붙임  1. 설계변경 사유서 1부.

2. 변경설계서 1부.

3. 설계변경 검토보고서 1부(별첨).  끝.

주무관							조진성				주무관					강금완					조경과장					강인호					관리부장						12/16 심상원
협조자				주무관							오창호					총무과장							이경로
시행			조경과-6641										(						)		접수												(						)
우	13829					경기도 과천시 대공원광장로 102 서울대공원 (막계동)																/			http://grandpark.seoul.go.kr/
전화		02-500-7511							/전송			02-500-7993					/	jsjo@seoul.go.kr													/	대시민공개