문서번호	토목부-27394
결재일자	2015.12.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
남덕희		명경출	12/18 노우성
협조

- 도시고속도로 연결램프(정릉길) 설치공사 -

장애인 보도 철거 및 재설치

2015.12.

도시기반시설본부

(토목부)

- 도시고속도로 연결램프(정릉길)설치공사 -

장애인 보도 철거 및 재설치

교각(P3) 가시설 시공시 저촉되는 장애인 보도를 철거후 공사완료단계에 재설치하기 위한 검토 보고임

※ 근거 : 감리단 실정보고〔극감정릉 제15-212(‘15.11.23)〕

도시고속도로 연결램프(정릉길) 설치공사

❍ 공사규모 : 도로 폭 5.24m~6.24m, 연장 533m

❍ 도 급 비 : 8,992,500천원(1차 3,009,000천원)

❍ 공사기간 : ′13.12.30. ~ ′16.12.29.(1차 : ′13.12.30.~′15.12.29.)

❍ 시 공 사 : 풍림산업(주) 외 1   ❍ 감 리 사 : 극동엔지니어링(주) 외 1

감리단 보고내용

❍ 장애인 보도현황 (L=27m, B=1.5m)

	H파일 시공라인
현 황 도 면	현 황 사 진

❍ 검토내용

- 성북구청에서 관리하고 있는 노후된 보도에 대하여 디자인 난간 설치요구

· 공사시 저촉되는 보도구간 철거 후 성북구청에서 시행중인 점토 바닥벽돌로 설치요구

- 교각(P3) 가시설공사의 H-Pile설치구간에 장애인 보도구간이 저촉되어  공사 완료시점에 공사시행하여 장애인 보도블럭 신설

❍ 수량 변경

공 종	단 위	수 량			비 고
		당 초	변 경	증․감
1. 보도블럭 철거 및 설치	㎡	-	46.44	46.44	신 규
2. 콘크리트 기초 철거 및 설치	㎡	-	9.29	128
3. 보행자 난간 해체 및 설치	m	-	27	27

❍ 공사비 변경                                                      (단위 : 천원)

공 종	당 초	변 경	증․감	비 고
보도구간 철거 및 신설	-	6,978	6,978	- 신규 단가 협의율 적용 :94.076%
제 경 비	-	2,812	2,812
관급자재(레미콘)		464	464
계	-	10,254	10,254

❍ 감리단 검토의견

장애인 보도구간 철거 및 설치는 교각(P3) 가시설 공사에 저촉되어  유지관리부서인 성북구청 도로시설과와 협의한 사항으로 향후 공사완료시점에 공사시행하고 추후 설계변경시 일괄반영함이 적정한 것으로   판단됨

조치의견

❍ 장애인 보도구간 철거 및 설치는 교각(P3)설치작업구간내 저촉되는 보도시설로서 향후 공사완료 시점에 시공하고, 설계변경하고자 하는 사항으로서 감리단 의견이 타당하므로 승인하고자 함

❍ 단가적용

장애인 보도철거 및 설치는 신규 품목으로 도급자와 성실히 협의하였으나 의견이 상충하므로 협의율 94.076%적용하고자 함

붙 임 : 감리단 검토보고서 1부.  끝.