문서번호	기획관리과-11914
결재일자	2015.12.18.
공개여부	부분공개
방침번호

				시 민
주무관	기획관리과장	데이터센터소장		정보기획관
김운기	김안철	이계헌		12/18 최영훈
협 조
	★인터넷통신과장		황기원

ICT교육장 조성 및 스피드게이트 설치 계획

2015. 12.

정보기획관

(데이터센터)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

ICT교육장 조성 및 스피드게이트 설치 계획

청사 내 물리적 보안 강화을 위해 ICT교육장 조성 및 스피드게이트 설치 공사를 시행하고자 함.

Ⅰ	추진근거

□ 2015년 종합감사 결과에 대한 조치계획 (‵15. 10. 1)

□ 데이터센터 물리적 보안강화 계획 (정보기획관 방침,‵15. 10. 5)

Ⅱ	사업개요

□ 사 업 명 : ICT교육장 조성 및 스피드게이트 설치

□ 총사업비 : 262,445천원 (관급자재, VAT 포함)

□ 공사기간 : 착공일로부터 45일

□ 사업내용

□ 구(舊) 식당을 ICT교육장(30인 교육장  2개소, 강사 대기실)으로 조성

□ 스피드게이트(SpeedGate) 설치

□ 추진경과

○ ‘15. 10. 20.	:	ICT교육장 조성 공사 설계용역 착수
○ ‘15. 11. 27.	:	ICT교육장 조성 공사 설계용역 완료

□ 소요예산 : 240,468천원

○ 예산과목

- 정보서비스의 안정적 제공, 청사유지관리, 데이터센터 청사시설 유지보수

시설비(공공운영비)

(단위 : 천원)

계	시설비	공공운영비	비고
240,468	200,000	40,468	EHP 실내기 관급자재 (22,679) 전기히터펌프(Electric Heat Pump) : 전기로 압축기를 구동 시키는 전기 냉·난방기 : 낙찰차액 사용

<붙임> : 세부 공사비 내역

Ⅲ	세부추진 계획

□ ICT교육장 조성 공사

1

건축·기계설비 공사

○ 공사발주

- 입찰 방식 :  제한경쟁입찰 (지역제한 :  서울시)

- 공사 금액 : 147,606천원 (관급자재, VAT 포함)

- 공사 내용

공종	주요 공사 내용	비고
· 건축 공사	기존 벽체, 마감재, 각 종 설비 등 철거 벽체 신설, 경량천정틀 및 텍스, 창호 설치
· 기계설비 공사	기존 설비(덕트, 증기 배관, 가스 배관)철거 EHP 실내기 설치(5대)

- 입찰 참가자격    : 실내건축공사업 면허를 보유한 업체

- 낙찰자 결정 방법 : 적격심사 (시설공사 적격심사 세부기준 적용)

○ 관급자재 구매

- 구매 품명 : 전기히트펌프

- 구매 비용 : 22,679천원

- 구매 방법 : 낙찰 차액 사용 조달 구매

※ 낙찰 차액 사용 사유 - 계획물량 증가(EHP 증설)분을 본 공사와 병행 실시하기 위해 시설비 낙찰 차액으로 구매

근거 : 지방자치단체 세출예산 집행기준 (행정자치부 예규 제9호, 2015. 1. 22) 14-1. 시설비

2

전기·통신·소방공사 _ 별도 발주

○ 공사발주

- 입찰 방식 : 전자공개수의계약

- 공사 금액 : 57,749천원 (관급자재, VAT 포함)

- 공사 내용

공종	주요 공사 내용	비고
· 조명설비 공사	조명 기구, 분전반, 스위치 박스 등 설치
· 통신·방송설비 공사	통신 케이블 및 스위치 박스 등 설치	앰프, 스피커 설비 이설 포함
· 소방설비 공사	연기 감지기, 화재경보기 등 설치

- 입찰 참가자격 : 분야별 관련법에 의한 전문공사 면허를 보유한 업체

- 발주 방법     : 분야별 개별 발주

○ 관급자재 구매

- 구매 품명 : 조명기구 (LED 40W/12W)

- 구매 비용 : 7,622천원

- 구매 방법 : 조달구매 / 청사시설 유지보수 공공운영비로 구매

□ 스피드게이트 설치 공사 _ 별도 발주

○ 공사발주

- 입찰 방식 : 전자공개수의계약

- 공사 금액 : 57,090천원 (관급자재, VAT 포함)

- 공사 내용

공종	주요 공사 내용	비고
· 출입통제 설비 공사	PVC선관, 컴퓨터용 케이블 등 설치 가이드 휀스(폴, 강화유리) 설치

- 입찰 참가자격 : 정보통신공사업 면허를 등록한 업체

○ 관급자재 구매

- 구매 품명 : 스피드게이트

- 구매 비용 : 32,846천원

- 구매 방법 : 조달구매 / 청사시설 유지보수 공공운영비로 구매

□ 행정사항

○ 전기·통신 분야(관급자재 포함) 별도 발주 추진 : 인터넷통신과

□ 향후계획

○ 2016. 01.	:	공사 발주 및 계약
○ 2016. 01.	:	공사 착수 및 시행
○ 2016. 03.	:	공사 준공

붙임 : 1. 데이터센터 물리적 보안강화 계획 1부.

2. 공사입찰 공고문 및 제한경쟁입찰 사유서 각 1부.

3. 설계도서(설계도면, 설계내역서– 별첨) 1부.  끝.

<붙임>

세부 공사비 내역

(단위 : 천원)

사업명	공종	당 초 사업계획	변경(설계)내역			비고
			시설공사	관급 자재	계
ICT 교육장 조성 공사	건축	158,300	123,079		123,079
	기계		1,848	22,679	24,527	EHP 실내기 추가 설치 : 5대
	소계		124,927	22,679	147,606
	전기·통신		50,127	7,622	57,749
스피드게이트 설치	정보·통신	-	24,244	32,846	57,090
CCTV카메라 설치	전기·통신	18,900	-		-	기 시행(′15.12)
4층 보안시스템 설치	건축·정보	22,800	-		-	기 시행(′15.11)
합계		200,000	199,298	63,147	262,445

※ 시설공사비는 VAT가 포함 된 금액