문서번호	시설관리과-31581
결재일자	2015.12.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
권승계		최희권	12/18 代고신석
협조

설계변경 심의 위원회 개최 결과 보고

(당산동3가 393-2 ~ 당산동1가 309간 송배수관 정비공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 12.

명에 의거 “당산동3가 393-2 ~ 당산동1가 309간 송배수관 정비공사”에 대하여 설계변경 심의위원회 개최 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2015. 12. 18.

보고자  : 지방시설주사  권 승 계

남부수도사업소장 귀하

제    목 : 설계변경 사전심의 결과 보고

공사개요

공 사 명 : 당산동3가 393-2 ~ 당산동1가 309간 송배수관 정비공사

공사개요

- 상수도관부설 : D=200~800mm, L=522m

공사기간 : 2015. 06. 09 ~ 2015. 12. 30

도 급 자 : 부기건설  대표 오만택

설계변경금액

- 당   초 : 699,891,520원

- 변   경 : 761,233,000원 (증61,341,480원)

설계변경 심의위원회 개최

일     시 : 2015.12.17.(목) 17:00 ~17:30

장    소 : 남부수도사업소 시설관리과

참석위원 : 위원장 시설관리과장(1명), 심의위원(급수운영과 3명)

간 사 시설관리과(1명), 입회자 2명(수급자1, 담당자1, 감독자1)

심의위원회 검토내용

변경내역에 대한 물량계산, 각종 보험료 및 내역 검토

신규내역 적정성 검토

설계변경 내역

구 분	당초 계약금액	변경 계약금액	증 ․ 감	비 고
총 공사비	699,891,520원	761,233,000원	증)61,341,480원

처리의견

우리사업소 설계변경 심의결과 적정하게 설계변경된 것으로 심의된 바, 설계변경 승인  및 본청 재무과에 설계변경 계약 의뢰코자 합니다

따로붙임 : 1. 설계변경 심의 의결서 1부.

2. 설계변경 관련서류 1부. 끝.