문서번호	기전과-12834
결재일자	2015.12.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	기전과장	북부도로사업소장
백윤광	이영목	12/18 노영석

『2015년 도로기전시설물 일상유지보수공사(연간단가)』

설계변경(정산) 검토 보고

2015. 12

북부도로사업소

(기전과)

『2015년 도로기전시설물 일상유지보수공사(연간단가)』

설계변경(정산) 검토 보고

우리 사업소에서 시행중인 『2015년 도로기전시설물 일상유지보수공사   (연간단가)』와 관련하여 1~9차 작업을 완료하고 시공사로부터 설계변경 서류가 제출되어 검토하고 보고드림.

▢ 공사개요

❍ 공 사 명 : 2015년 도로기전시설물 일상유지보수공사(연간단가)

❍ 공사개요 : 터널 및 지하차도 도로기전시설물 일상유지보수공사 1식

❍ 공사기간 : 2015. 3. 6 ~ 2015. 12. 31

❍ 공사금액 : 249,760,000원

❍ 도 급 자 : ㈜청호파워텍 대표 이 순 형

▢ 설계변경 사유

❍ 1~9차 작업완료에 따른 공사물량 증감으로 설계변경 필요.

구 분		당 초	변 경	증 감
총 공 사 비		249,796,000	249,601,000	(감) 195,000
도급비	공급가액	227,087,273	226,910,000	(감) 177,273
	부가가치세	22,708,727	22,691,000	(감) 17,727
	계	249,796,000	249,601,000	(감) 195,000

▢ 설계변경 내역                                   (단위 : 원)

▢ 조치 계획

❍ 상기 보고내용과 같이 공사금액에 맞춰 설계변경(정산)을 시행코자 함.

붙임 : 1. 설계변경(정산) 내역서. 1부.

2. 도로기전시설물 추진 현황(최종). 1부.