투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	변경계약 의뢰(지하철920공구 건설공사 폐기물처리용역)

1. 우리본부에서 시행중인 『지하철9호선3단계 920공구 건설공사 폐기물처리용역』에 대하여 물량변경으로 인한 계약금액을 아래와 같이 조정하여 시행코자 변경계약을 의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 지하철 9호선3단계 920공구 건설공사 폐기물처리용역

나. 계 약 자 : ㈜한진산업 대표 김상현

다. 용역개요 : 지하철9호선 3단계 920공구 건설공사 폐기물처리

라. 예산과목 : 도시기반시설본부, 도시철도건설, 도시철도건설사업,

도시철도9호선3단계건설, 시설비및부대비, 시설비

마. 설계변경 내역                                      (단위 : 천원)

구 분		당 초	변 경	증ㆍ감	비 고
5 차 (1회)	계약금액	709,446	709,446	변경없음
	기 간	‘10.08.27~ ’15.12.31	‘10.08.27~ ‘16.02.17	-

바. 변경사유 : 지하철920공구 폐기물 배출계획 변경에 따른 기간연장

따로붙임 : 1) 설계변경 검토보고서 1부.

2) 변경설계서(5차1회) 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김승조		토목3과장	김정수		도시철도토목부장	12/18 김진팔
협조자	주무관	김소연
시행	도시철도토목부-16134	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 9층	/
전화	02-772-7154	/전송	02-772-7306	/		/	대시민공개