문서번호	기전과-9041
결재일자	2015.12.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
차준원		12/18 최주용
협조
	주무관		이명호

『2015년 교통사고 잦은곳 개선 교통안전표지공사(군자역외 2개소)』

실정보고 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 12

성동도로사업소

(기 전 과)

『2015년 교통사고 잦은곳 개선 교통안전표지공사(군자역외 2개소)』

실정보고 검토 보고

2015년 교통사고 잦은곳개선 교통안전표지공사(군자역외 2개소)와 관련 시공사 공사현장 실정보고가 있어 검토후 그결과를 보고드림

관련근거

○ (주)라텍이엔지 라텍 제2015-125호 : 실정보고 제출

공사개요

○ 공 사 명 : 2015년 교통사고 잦은곳개선 교통안전표지공사                          (군자역외2개소)

○ 도 급 자 : ㈜라텍이엔지 대표 정재금

○ 도 급 비 : 13,272,600원

○ 공사기간 : 2015.11.23. ~ 2015. 12.31

시공사 의견 및 검토결과

연번	장소	현황 및 문제점	시공사 의견	검토결과
1	군자교	표지판(129) 2개 기설치되어 있음	과속방지턱 표지 2개 물량 삭제	현장 여건에 맞게 과속방지턱 표지 2개 삭제하고 물량 변경하여 시공함이 타당함
2	중곡주유소	일방통행 미설치 구간 표지판(326) 3개 삭제	일방통행 표지 3개 물량 삭제	현장 여건에 맞게 일방통행 표지 3개 삭제하고 물량 변경하여 시공함이 타당함
3	청계8가	신호지주 미 이설로 교통안전표지(고소용) 이설 불가	교통안전표지(고소용) 이설 물량 삭제	현장 여건에 맞게 고소용표지 이설 삭제하고 물량 변경함이 타당함

☞변경 예상금액

변경전	변경후	증 감
13,272,600원	11,572,000원	감) 1,700,600

조치의견

〇 공사 실정보고에 대한 시공사의 의견을 검토한 결과 보고 내용이 타당    성이 있어 이를 현장 여건에 맞도록 설계변경 및 시공토록 감리자에게     지시 하고자 합니다.

붙   임 : 1. 실정보고 1부. 끝.