소방정보ㆍ통신장비 구입설치(공사) 감독일지
전산통신과-6903				담당자	정보통신팀장	전산통신과장	결재
				남성의	주종옥	12/18 강경철
공정 내용	진척공정	82.5%	진척주요추진사항
	금주공정	82.5%	금주주요 추진사항	- 영상저장 SW 시험운영 - 영상공유 SW 시험운영 - 재난영상공유SW 설치 및 테스트 - 영상관리SW 시험운영 - 중앙관제SW GUI 통합 및 기능 테스트
◎ 금주 작업내용 ( ∼ 12. 11) ▪ 사업관리 - ▪ 하드웨어 - 기존 영상공유 시스템 연결 및 대체 구동 운영 진행 - 유관기관 장비 설치 진행 ▪ 소프트웨어 - 영상공유 소프트웨어 시험운영 진행 - 영상저장 소프트웨어 시험운영 진행 - 영상관리 소프트웨어 시험운영 진행 - 재난영상공유 소프트웨어 운영테스트 - 중앙관제 소프트웨어 IP 매트릭스 기능 및 상황판 소프트웨어 GUI통합 진행 ▪ 설치공사 -
금주투입인원 - 정보통신팀 : 소방교 남성의 - (주)에스디시스템 : 이호근 부장, 고진현 과장, 김유철 실장, 구성모 팀장, 이경태, 안재원, 박광순, 김지상, 김영찬
◎ 특기사항 - 영상저장 / 영상공유 / 영상관리 소프트웨어 시험운영 - 재난영상공유 소프트웨어 테스트 진행 - 중앙관제 솔루션 GUI 통합 및 기능테스트 진행 ◎ 차주 업무예정 - 영상저장 / 영상공유 /영상관리 소프트웨어 시험운영 및 관찰 - 재난영상공유 소프트웨어 운용테스트 및 디버깅 작업 - 중앙관제솔루션 IP매트릭스 기능테스트 및 상황판 소프트웨어와 GUI 통합 개발작업