투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신	관리과장
(경유)
제목	설계변경 시행[2015 건설폐기물 처리용역(연간단가)]

1. 우리센터에서 시행하고 있는“2015년 건설폐기물 처리용역(연간단가)”에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행하고자 합니다.

가. 용 역 명 : 2015년 건설폐기물 처리용역(연간단가)

나. 용역기간 : 2015. 4. 2. ~ 2015. 12. 31

다. 도 급 자 : ㈜동보이앤시  대표 김지환

라. 변경사유 : 용역수량 감

마. 예산과목 : 난지물재생센터 운영관리, 난지물재생센터 운영관리,

난지물재생센터 공통분야 유지보수, 시설비및부대비, 시설비

바. 설계변경 내역

구 분	당초금액	변경금액	증․감	비 고
총용역비	44,016,400	8,855,000	감35,161,400
도 급 비	38,374,000	8,855,000	감29,519,000
이 설 비	5,642,400	-	감 5,642,400

첨부  1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경서 1부.  끝.

	물재생과장
주무관	김민호		시설팀장	김재봉		물재생과장	12/18 김일운
협조자	주무관	황재상
시행	물재생과-5338	(		)	접수		(		)
우	10542	경기 고양시 덕양구 대덕로426(현천동)	/
전화	02-300-8558	/전송	02-300-8580	/		/	대시민공개