문서번호	도시철도토목부-16166
결재일자	2015.12.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목3과장	도시철도토목부장
정삼기		김정수	12/18 김진팔
협조
	주무관		정성환

『921공구 건설폐기물 처리용역(5차)』

준공검사 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 12.

도시기반시설본부

도시철도토목부

「921공구 건설폐기물 처리용역(5차)」

준공검사 결과보고

서울 지하철 9호선 3단계 921공구 건설공사 폐기물처리용역(5차)에 대한 준공검사 결과를 보고 드림.

1		용역개요

❍ 용 역 명 : 서울지하철9호선 3단계 921공구 건설공사 폐기물처리용역

❍ 용역기간 : ‘10.08.27~’16.02.17

❍ 용 역 비 : 634,605천원

❍ 계 약 자 : 대흥에코 주식회사 대표이사 박근호

❍ 감 리 사 : ㈜유신

2		준공검사 현황

❍ 일   시 : 2015. 12. 16(수)

❍ 준공검사자 : 책임감리원 박성찬

3		준공검사 결과(5차)

❍ 용역기간 : ‘15.09.03 ~ ’15.12.20

❍ 계약금액 : 20,000천원

❍ 준공내역                                          (단위:ton)

구분	계약수량	전회기성 수량	금회 수량	누계	장래
폐콘크리트	29,531	23,228	1,110	24,338	5,193
폐아스콘	6,334	4,665	-	4,665	1,669

❍ 준공검사자 의견 : 건설폐기물 처리용역 준공검사결과 적정함

4		준공검사 결과 및 조치계획

❍ 책임감리사인 ㈜유신으로부터 설계내역 및 기타 약정대로 완료한 것으로 보고되어 준공처리코자 하며, 준공기성금에 대하여 계약상대자에게 지급토록 건설총괄부에 요청

- 준공기성금 현황

(단위 : 천원)

구 분	계약금액	전회까지 기성금	준공 기성금	장래
921공구 건설공사 건설폐기물처리용역	634,605	494,000	20,000	120,605

첨부 : 준공검사 결과보고 1부.   끝.