투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	'15/'16 제설작업 용역(장기계속) 설계변경(제1회) 시행

우리사업소에서 시행중인 『‘15/’16 제설작업 용역(장기계속)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(제1회) 시행코자 합니다.

가. 용 역 명 : ‘15/’16 제설작업 용역(장기계속)

나. 용역기간 : 총차분 2015. 11. 06 ~ 2016. 03. 30.

(1차분 2015. 11. 06 ~ 2015. 12. 31)

다. 총용역비 : 총차분 금217,283,000원(1차분 금73,470,000원)

라. 계 약 자 : ㈜해남건업, 대표 박정숙

마. 설계변경 내역

(단위:원)

구 분		당 초	변 경	증 · 감
총용역비		217,283,000	237,963,000	증)20,680,000
도급비	1차분	73,470,000	136,895,000	증)63,425,000
	2차분	143,813,000	101,068,000	감)42,745,000
	총차분	217,283,000	237,963,000	증)20,680,000

바. 설계변경 사유

◦ 제설작업 전진기지 변경설치에 따른 인력 및 장비추가 등

◦ 제설대책 추진(용역비)에 따른 예산 재배정(29,000천원)

사. 예산과목

구 분	예 산 과 목	예 산 액	비고
제설대책추진	도로관리과,도로시설물관리,도로및도로부속물유지관리,제설대책추진,시설비및부대비,사무관리비	219,000천원

첨부 1) 설계변경 검토보고서 1부.

2) 설계변경 내역서 2부.

3) 합의각서 1부.  끝.

주무관	정병구		도로보수과장	이규철		서부도로사업소장	12/18 배광환
협조자	주무관	이상하		주무관	윤미란		주무관	송세진
계약1팀장	김점선
시행	도로보수과-12735	(		)	접수		(		)
우	03918	서울특별시 마포구 가양대로 203 서부도로사업소	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02)300-8354	/전송	02)300-8364	/	basewaa007@seoul.go.kr	/	비공개(7)