문서번호	토목부-27395
결재일자	2015.12.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
김구		명경출	12/18 노우성
협조
	주무관		장종환

설계변경(전체10회, 9차2회) 시행

【강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사】

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.12.

도시기반시설본부

(토목부)

설계변경(전체10회, 9차2회) 시행

【강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사】

『강남순환도시고속도로(8공구)건설공사』에 대한 현장여건반영 및 시공물량 변경 등에 따른 전체(10회), 9차(2회) 계약분에 대한 설계변경 검토 보고임.

관련근거

❍ 동기공 2015-4760호(`15.12.16.) 설계변경(전체10회, 9차2회) 검토 보고

공사개요

❍ 공 사 명 : 강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사

❍ 공사규모 : 폭 4~10차로, 연장 7.96km(교량 2개소, 지하차도 4개소)

❍ 공 사 비 : 229,982백만원 (9차: 25,000,000천원)

❍ 공사기간 : 2002. 7. 3. ~ 2018. 7. 31.(9차 `15.3.10.~`15.12.31.)

❍ 시 공 사 : 롯데건설(주) 외 1

❍ 감 리 사 : ㈜동명기술공단

설계변경 내용

❍ 공사금액 및 공사기간

(단위 : 천원)

구 분		공사금액	증･감	공 사 기 간	비고
전체(10회)	당초	229,982,000		2002.07.03.~2018.07.31.
	변경	233,910,000	증)3,928,000	2002.07.03.~2018.07.31.
9차(2회)	당초	25,000,000		2015.03.10.~2015.12.31.
	변경	17,400,000	감)7,600,000	2015.03.10.~2015.12.31.

❍ 주요수량 변경(증･감) 현황

(단위 : 천원)

구분	제 목	주요변경사항	공 사 비
			당초	변경	증･감
1	사토물량 운반거리 조정	사토장 변경에 따른 운반거리 조정 반영	8,015,000	7,906,000	- 109,000
2	본선고가교 설계도서 검토결과 반영	설계도서 보완 반영 및 수량 오류 정정	1,590,000	1,581,000	- 9,000
3	본선교 P3, P4 동바리 거푸집 형식변경, 교통안전시설물 설치	합판거푸집을 강재거푸집으로 변경(공기단축)	136,000	342,000	206,000
4	본선교 방음벽 형식 변경	7-2공구와 동일형식 방음벽 변경(흡음형→투명형)	1,687,000	3,206,000	1,519,000
5	본선교 동절기 보양계획 반영	동절기 양생공사비 반영	-	287,000	287,000
6	주암교 거푸집 형식변경	수서방향 교각 곡선부 강재거푸집 반영(공기단축)	32,000	231,000	199,000
7	염곡지하차도 기둥보강공사 교통처리계획 반영	기둥보강공사 교통처리계획 안전시설물 설치비 반영	-	14,700	14,700
8	암거구조물 공법 변경	수서방향 암거구조물 변경(현장타설→PC암거)	930,000	1,005,000	75,000
9	구룡지하차도 구간 우수관 변경	배수시설물 노후화로 관로개량(∅1200→∅1500)	337,000	876,000	539,000
10	주암교 구간 우수관 변경	양재천 방류 우수관 규격변경(∅600→∅1000)	161,000	224,000	63,000
11	본선교 우·오수관 임시이설 공사 반영	본선교 P8 R-A, A2 R-A저촉 기존 우·오수관이설	-	31,000	31,000
12	LH앞 빗물받이 인상 및 포장	빗물받이 인상 및 주변부 덧씌우기 포장시행	-	9,060	9,060
13	지장수목 제거 및 대체 수목 식재 반영	가이식후 정식으로 계획됐으나 제거후 대체수목 식재변경	105,000	97,000	- 8,000
14	양재대로 산림수목 이식 및 제거	양재대로확장시 산림수목 제거 누락 반영(265주)	-	43,000	43,000
15	염곡지하차도 시상수도 이설공사 정산분 반영	실시공 물량으로 정산	841,000	792,000	- 49,000
16	주한미군통신 및 과천 ITS 선로 이설공사 반영	양재대로 확장구간 지장선로 이설비 반영	-	738,000	738,000
17	주암교 연결도로 교통안전시설물 설치공사 반영	교통처리시 단계별 안전시설물 설치비 반영	113,000	157,000	44,000
18	화훼단지내 관정 폐공 및 신규설치	화훼단지 대체관정 주민민원내용 반영	-	35,000	35,000
19	화훼단지내 화장실 철거 및 신규 설치	화훼단지내 화장실 철거 및 설치내용 반영	-	37,000	37,000
20	화물지하차도구간 분전함이설공사 반영	도로확장 시 분전함 이설	-	21,000	21,000
21	화물지하차도구간 버스정류소 이설공사 반영	도로확장 시 기존 버스정류소 이설 시행	-	13,500	13,500
22	공사용 웹카메라 설치반영	건설공사 정보 제공 웹카메라 설치비 반영	-	28,800	28,800
23	민자접속구간 야간 임시조명 설치	야간공사시 임시조명 설치비 반영	-	117,000	117,000
24	과천시 구간 폐기물수량 변경	추가폐기물 상차비 반영	3,431	6,918	3,487
25	공사중 교통처리계획 수립비 반영	교통소통대책 추가과업내용 반영	277,200	383,487	106,287
26	화물지하차도 우수처리 설계용역비 반영	여의천 방류부 배수처리방안 설계용역비 반영	-	22,330	22,330
27	물가변동비 정산 반영	차수별 물가변동 기성 반영분 공제		-49,164	- 49,164
합 계			14,227,631	18,155,631	3,928,000

❍ 공사비 변경(증･감) 현황

(단위 : 백만원)

구 분	전체(10회)			9차(2회)
	당초	변경	증･감	당초	변경	증･감
1. 토공	11,240	11,216	24	232	4	228
2. 배수공	5,597	6,173	576	667	512	155
3. 구조물공	107,836	109,767	1,931	15,384	11,020	4,364
4. 포장공	12,480	12,463	17	958	292	666
5. 기계설비공	500	500	-	-	-	-
6. 조경공	3,085	3,114	29	16	50	34
7. 시상수도이설공	3,007	2,950	57	623	565	58
8. 부대공	12,404	13,268	864	348	435	87
9. 교통시설물설치공	107	107	-	-	-	-
직접공사비	156,256	159,558	3,302	18,228	12,878	5,350
제 경 비	52,819	53,087	268	4,499	2,940	1,559
공급가액	209,075	212,645	3,570	22,727	15,818	6,909
부가가치세	20,907	21,265	358	2,273	1,582	691
도 급 액	229,982	233,910	3,928	25,000	17,400	7,600

❍ 설계변경 사유

- 현장여건 변경에 따른 실정보고 승인 사항 반영

- 9차 공사 실제 정산 수량 반영

조치계획

❍ 현장여건 변경 등으로 시공수량 변경됨에 따라 전체(10회) 및 차수(9차2회) 공사에 대해 설계변경하여 계약금액을 조정하고자 함.

붙 임 : 1. 감리검토의견서 1부.

2. 설계변경내역서(전체10회, 9차2회) 각1부.

3. 예정공정표 1부.  끝.