문서번호	정수과-12762
결재일자	2015.12.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
김선례		서한호	12/18 임정규
협 조
	주무관			박소현
	주무관			권오정
	주무관			유동구

차수별 물량조정에 따른

『사업장폐기물 처리용역』변경계약 추진 계획

2015. 12.

영등포아리수정수센터

(정 수 과)

사업장폐기물처리용역 변경계약 추진계획

『사업장폐기물 처리용역(단가계약)』과 관련하여 차수별 물량변동에 따른 변경계약을 다음과 추진하여 계약관리에 만전을 기하고자 합니다.

□ 용역계약 현황

○ 계약명 : 사업장폐기물(무기성 정수슬러지) 처리용역(장기계속 연간단가)

○ 용역기간 : 2014. 6. 1 ~ 2016. 5. 31

○ 계약상대 : 처리자[진명기업(대표 최환준)], 운반자[임송농산(대표 양기훈)]

○ 계약금액(2차수) : 금1,359,849,200원(총부기계약금액:금2,283,304,100원)

구 분	합계	2014년 (6.1~12.31)	2015년 (1.1~12.31)	2016년 (1.1~5.31)	비고
처리물량	69,408톤	12,408톤	41,000톤	16,000톤
금 액(원)	2,283,304,100원	400,987,340원	1,353,849,200원	528,467,560원

○ 세부계약 내역(2015년)

구 분	금액(원)	물량(톤)	단가(원/톤)		비고
			처리비	운반비
계	1,353,849,200	41,000	-	-
영등포	392,063,100	13,000	19,633.9	10,524.8
뚝도	504,586,500	15,000		14,005.2
구의	457,199,600	13,000		15,535.3

□ 변경계약 사항

○ 2015년도 사업장폐기물 처리현황(12.15일까지 물량)

- 처리물량 : 23,343톤(계약대비 17,657톤 감소)

- 처리금액 : 금759,882,340원(계약대비 금593,966,860원 감소)

구 분	처리금액(원)	처리물량(톤)	변동(톤)	비고
계	759,882,340	23,343	감17,657
영등포	298,148,900	9,886	감3,114
뚝 도	253,672,453	7,541	감7,459
구 의	208,060,987	5,916	감7,084

○ 변경계약 내용

- 차수별 물량 조정 : 2차년도 감소물량(17,657톤)을 3차년도로 이월

- 물량조정에 따른 차수별 금액조정

- 계약기간, 처리단가, 총물량 및 총부기금액은 변경 없음

○ 세부 변경내역

- 차수별 물량조정                                               (단위:톤)

구 분		당 초	변경후	변동사항	비 고
총물량		69,408	69,408	변동없음
차수별	1차(2014)	12,408	12,408	0
	2차(2015)	41,000	23,343	감17,657톤
	3차(2016)	16,000	33,657	증17,657톤

- 물량조정에 따른 차수별 금액조정                                 (단위:원)

구 분		당 초	변경후	변동사항	비 고
총용역비		2,283,304,100	2,283,304,100	변동없음
차수별	1차(2014)	400,987,340	400,987,340	0
	2차(2015)	1,353,849,200	759,882,340	감593,966,860원
	3차(2015)	528,467,560	1,122,434,420	증593,966,860원

□ 보고자 의견

○ ‘15년도 회계연도 마감으로 인하여 12월 처리물량 중 12.15까지 처리분에 대하여 12.29까지 정산 지급하고, 12.16~12.31까지의 처리물량은 ’16년도 1월분 처리비에 포함하여 정산·지급하고자 함.

○ 2차,3차년도 처리물량 변동에 따라 설계변경하고, 재무과로 변경계약 의뢰하고자 함.

붙임 : 1. 합의서 1부.

2. 변경 내역서 2부(전체, 2차년도분).  끝.