문서번호	도시철도토목부-652
결재일자	2014.1.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		궤도과장	도시철도토목부장
조태현		윤방식	01/17 이은상
협 조

『서울지하철9호선 3단계 919공구 폐기물처리용역(3차)』

준공기한 연기 검토보고

2014. 1.

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

『서울지하철9호선 3단계 919공구 폐기물처리용역(3차)』

준공기한 연기 검토보고

『서울지하철9호선 3단계 919공구 건설공사』로 발생하는 건설폐기물을 처리하기 위한 폐기물처리용역(3차)에 대하여 준공기한 연기사유가 발생함에 따라 검토하여 보고 드림.

폐기물 처리 용역 현황

용 역 명 : 서울지하철9호선 3단계 919공구 건설공사 폐기물처리용역

계 약 자 : 문화기업㈜  대표 김태흔

계약금액 : 금679,220,000원 (3차 : 금180,000,000원)

용역기간 : 총괄 2010.08.27 ~ 2016.02.17

3 차 2013.01.30 ~ 2014.01.21

폐기물 처리용역 계약현황

구 분	용역비 (천원)	용역기간	수 량(TON)			비 고
			폐아스콘	폐콘크리트	계
총괄분	679,220	`10.08.27 ~ `16.02.17	15,165	23,350	38,515
1차분	110,000	`10.08.27 ~ `11.12.20	5,407	1,134	6,541	준공
2차분	112,000	`12.03.16 ~ `13.01.20	2,275	4,053	6,328	〃
3차분	180,000	`13.01.30 ~ `14.01.21	5,285	5,057	10,342	진행중
장 래	277,220	~ `16.02.17	2,198	13,106	15,304

폐기물 용역(3차) 처리현황 및 공기 검토

3차 폐기물 처리 현황   (기준일 : 2013.12.31)

구 분	수 량(TON)			비 고
	계약수량	처리량	잔 량
폐아스콘	5,285	5,285	0
폐콘크리트	5,057	4,533	524
계	10,342	9,818	524

폐기물 처리용역기간 검토(3차)

- 931S2E2환기구 구간 쉴드TBM 갱구보강 수평그라우팅 시기 미도래로 3차 폐기물 처리 용역의 잔여량을 준공기한(2014.01.21.) 내 처리하기가 어려울 것으로 판단됨.

책임감리원 검토의견

- 폐기물 처리가 원활히 될 수 있도록 폐기물 처리용역(3차) 기간을 연기함이 타당.

조치의견

책임감리단의 검토의견과 같이 현재 진행중인 폐기물 처리용역의 3차에 대해서 해당 공사인 지하철 919공구의 건설폐기물 배출계획을 반영하여 용역기간을 변경하는 것이 적정할 것으로 판단되므로 준공기한을 아래와 같이 연기하고자 함

3차 용역기간 변경

구 분	폐기물 처리 현황		3 차	비 고
당초	폐콘크리트	5,057	2013.01.30 ~ 2014.01.21
	폐아스콘	5,285
변경	폐콘크리트	5,057	2013.01.30 ~ 2014.02.20
	폐아스콘	5,285

따로붙임 : 1. 감리 검토의견서 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부.  끝