문서번호	토목부-27391
결재일자	2015.12.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
남덕희		명경출	12/18 노우성
협조

- 도시고속도로 연결램프(정릉길) 설치공사 -

H-Pile 이음비 반영

2015.12.

도시기반시설본부

(토목부)

- 도시고속도로 연결램프(정릉길)설치공사 -

H-Pile 이음비 반영

내부순환도로 강Box하부와의 형하고가 낮아 H-Pile 근입이 불가하여 H-Pile 이음 시공에 따른 비용지급을 위한 검토 보고임

※ 근거 : 감리단 실정보고〔극감정릉 제15-213(‘15.11.23)〕

도시고속도로 연결램프(정릉길) 설치공사

❍ 공사규모 : 도로 폭 5.24m~6.24m, 연장 533m

❍ 도 급 비 : 8,992,500천원(1차 3,009,000천원)

❍ 공사기간 : ′13.12.30. ~ ′16.12.29.(1차 : ′13.12.30.~′15.12.29.)

❍ 시 공 사 : 풍림산업(주) 외 1   ❍ 감 리 사 : 극동엔지니어링(주) 외 1

감리단 보고내용

❍ 가시설 H-Pile 천공 현황

공 종	단위	수량	H-Pile 길이	내부순환도로저촉여부	비 고
교 대	본	20	H=6.860∼8.570	저 촉	H=6.5m이상 반영
교각(P1)	본	20	H=5.985∼9.506	비저촉	해당없음
교각(P2)	본	20	H=4.792∼5.741	비저촉	해당없음
교각(P3)	본	20	H=5.650∼9.687	비저촉	해당없음
교각(P4)	본	20	H=4.080∼6.259	비저촉	해당없음
옹벽1구간	본	27	H=2.400∼5.400	비저촉	해당없음
U-Yype보도박스	본	40	H=2.000∼6.490	비저촉	해당없음
옹벽3구간	본	16	H=2.000∼5.960	비저촉	해당없음
옹벽5구간	본	27	H=2.000∼8.470	저 촉	H=6.5m이상 반영
옹벽6구간	본	30	H=2.000∼6.400	비저촉	해당없음
계		240

❍ 가시설 H-Pile이음 반영사유

현 장 사 진	파일항타 장비시공 예시도

- H-Pile천공 후 H-pile근입시 원지반과 내부순환도로 교량강BOX하부와의 형하고(H=7.0m)와의 차이로 인하여 H-Pile 6.5m이상은 H-Pile 근입이 어려워 H-Pile이음 후 H-Pile근입이 이루어짐

❍ 가시설 H-Pile이음 현황

구 분	H-Pile 총수량	이음수량	비고
교 대	20본	9본	시공 형하고 부족
옹벽5구간	27본	20본
계	47본	29본

❍ 수량 증감 현황

공 종	단 위	수 량			비 고
		당 초	변 경	증․감
교대 H-Pile이음	본	-	9	9	- 내부순환도로저촉 (시공 형하고 부족)
옹벽5구간H-Pile이음	본		20	20
계			29	29

❍ 공사비 증감 현황                                      (단위 : 천원)

공 종	당 초	변 경	증․감	비 고
H-Pile이음	-	5,917	5,917	- 신규단가 협의율 94.076%적용
제 경 비	-	2,683	2,683
계	-	8,600	8,600

❍ 감리단 검토의견

가시설 H-Pile이음 반영은 현장조사 결과 원지반과 내부순환도로 교량강BOX하부와의 형하고(H=7.0m)와의 차이로 인하여 H-Pile 6.5md이상은 H-Pile 근입이 어려워 H-Pile이음 후 H-Pile 근입이 이루어져야 할 실정이므로 H-Pile 이음반영은 타당하다고 사료됨

조치의견

❍ 감리단 검토의견과 같이 가시설 H-Pile이음 설치가 불가피하므로 우선 공사를 시행하고, 추후 설계변경시 정산처리하고자 함

❍ 단가적용

가시설H-Pile 이음설치는 신규 품목으로 도급자와 성실히 협의하였으나 의견이 상충하므로 협의율 94.076%적용하고자 함

붙  임 : 감리단 검토보고서 1부.  끝.