문서번호	시설보수과-7455
결재일자	2015.12.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		시설보수과장		동부도로사업소장
김종범		박용선		12/18 임대성
협 조
	주무관				김현기
	주무관				나철흠
	주무관				조장호

회 의 결 과 보 고

(택지개발지구내 도로시설물 인수.인계 관련 3차)

2015. 12.

동부도로사업소

(시설보수과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

회 의 결 과 보 고

(택지개발지구내 도로시설물 인수.인계 관련)

1		회 의 개 요

○ 일    시 : 2015. 12. 17 14:00~15:00

○ 장    소 : 동부도로사업소 2층 회의실

○ 참석 현황 : 15명

- 시공관계자 8명 : 발주처 3명, 시공사 3명, 감리 2

- 유지관리기관 7명 : 시설보수과장외 6명

○ 회의안건 : 도로시설물 인수.인계 관련 재반 사항

2		인 수 대 상

○ 택지개발지구 내 도로시설물 현황

- 도로시설물

시설명	위 치	개 요	시공사	준공예정일	담당	공정 (%)	비고
탄천우안도로 지하차도	송파구 문정동	B=8.5~11.5m L=370m(상행) L=470m(하행)	㈜엠지엘 대보건설(주)	2015.10.13	김종범	90	SH
위례1지하차도	송파구 장지동 ~하남시 학암동	B=16.8m L=628m	금호산업(주)	2015.12.30	나철흠	80	LH
장지지하차도	송파구 장지동 ~성남시 창곡동	B=18~24m L=1,275m	진흥기업(주) 홍익산업개발(주)	2016.03.30	조장호	80	SH

- 기전 및 기타 관리동 시설물

시설명	비 상 발전기	배수 펌프	CC TV	조명 시설	FAN	전광판	진 입 차단막	집수정	관리동
탄천우안도로 지하차도	1대	3대	-	100개	-	-	-	1개소	1개동
위례1지하차도	-	-	4대	468개	-	-	-	-	-
장지지하차도	1대	12대	22대	932개	14대	2개소	2개소	3개소	1개동

3		그동안 추진현황

○ 1차 회의 : 2015. 8. 18.

- 회의내용 : 시설물 인수.인계 자료 사전준비 요청 등

○ 1차 외부전문가 현장 점검 : 2015. 9. 2.

- 점검내용 : 콘크리트 구조체, 노면포장, 배수시설, 환기설비 등

○ 2차 회의 : 2015. 10. 19.

- 회의내용 : 외부 전문가 현장점검 사항 및 1차 협의사항에 대한 조치요청 등

4		발주처에 협조 요청한 사항

○ 1차 협의사항에 대한 기한내 조치 요청

- 탄천우안도로지하차도

∙ 충격흡수시설 설치요구(2016년 3월 설치예정)

- 장지지하차도

∙ U타입 구간의 교통사고 예방과 소음절감을 위한 조치 요구(2016년 3월 그루빙 및 염수분사시설 설치예정)

○ 1차 외부전문가 점검사항에 대한 기한내 조치 요청

- 탄천우안도로지하차도

∙ 균열 현황도 및 보수 적용 공법을 정리하여 유지관리 부서에 인계 등

(2016년 3월~4월 조치예정)

- 장지지하차도

∙ 측벽부 도색을 타일로 변경 검토 등(2016년 3월 도색 조치예정)

- 위례1지하차도

∙ U타입 구간의 차량소음에 대한 민원 가능성 사전 검토 등(2016년 상반기 까지 검토예정)

5		향 후 계 획

○ 외부전문가 2차 현장점검(예정)

- 현장점검 일자 : 2016년 3월 중

- 현장점검 방법 : 외부전문가 및 시공관계자와 합동점검

- 주요 점검 내용

∙ 1차 점검 지적사항에 대한 조치현황

∙ 유지관리 상 보완이 요구되는 사항 등

따로붙임 : 1. 회의자료(3차)  1부

2. 1차 협의사항 조치 현황 1부.

3. 외부전문가 점검사항 조치결과 1부.

4. 회의 참석자 명단 1부.  끝.