투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	계약변경 의뢰[2015년 교통사고 잦은곳개선 교통안전표지공사(군자역외2개소)]

1. 성동도로사업소 기전과-9056호(2015.12.18)와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 시행중인『2015년 교통사고 잦은곳개선 교통안전표지공사(군자역외2개소)』에 대하여 계약변경 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2015년 교통사고 잦은곳개선 교통안전표지공사(군자역외2개소)

나. 도 급 자 : ㈜라텍이엔지 대표 정재금

다. 공사기간 : 2015.11.23 ~ 2015.12.31

라. 계약금액 : 13,272,600원

마. 변경내용 : 설계도서와 현장여건의 상이한 부분을 현장여건에

맞게적용하여 설계변경 하고자 함

바. 설계변경 금액

변경전	변경후	증감액
13,272,600원	11,572,000원	감)1,700,600원

사. 예산과목

- 교통운영과,도시교통체계 및 소통개선,교통소통 및 안전관리강화,

교통사고 잦은 곳 개선, 시설비(401-01)

붙    임 : 1. 설계변경 검토보고 및 내역서  1부

2. 합의각서 1부. 끝.

	기전과장
주무관	차준원		주무관	문준호		기전과장	12/18 최주용
협조자
시행	기전과-9057	(		)	접수		(		)
우	04807	서울특별시 성동구 자동차시장길 41 성동도로사업소 기전과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2210-1541	/전송	02-2210-1536	/	michael3770@seoul.go.kr	/	대시민공개