문서번호	시설보수과-9976
결재일자	2015.12.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장
김규춘		전결 12/18 박병연
협조

- 도림천복개(좌안)보수공사 건설폐기물처리용역 -

설계변경 검토 보고(정산)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 12

강서도로사업소

시설보수과

- 도림천복개(좌안)보수공사 건설폐기물처리용역 -

설계변경 검토 보고

2015년도 예산사업으로 시행한『도림천복개(좌안)보수공사 건설폐기물처리용역 』에 대한 설계변경(정산) 검토 보고 임

※ 근거 : 서울특별시시설관리공단 공사감독 1처-11812호(2015.12.14)

Ⅰ		용역현황

용역명 : 건설폐기물 수집·운반 및 처리용역〔도림천복개(좌안)보수공사〕

용역기간 : 2015.9.7 ~ 2016.1.4.

용역개요 : 폐기물 운반 349.75㎥, 폐기물 처리 821.3톤

도 급 비 : 22,780,800원

계 약 자 : ㈜삼표  대표 정진호

감 독 자 : 서울특별시시설관리공단 공사감독 1처 성경석

Ⅱ		설계변경 내역

설계변경 사유 : 폐기물 처리물량 증·감에 다른 계약금액 변경

폐기물 변경 내역(증·감)

구분	단위	폐기물 증.감 내역			비고
		당 초	변 경	증.감
폐기물 운반	㎥	349.75	306.63	감) 43.12
폐기물 처리	톤	821.30	720.98	감) 100.32

용역비 변경 내역(증·감)                           (단위:원)

구 분		변경 내역			비고
		당 초	변 경	증·감
총 용역비		22,780,800	19,833,000	감) 2,947,800
용역비	공급가액	20,709,819	18,030,000	감) 2,679,819
	부가가치세	2,040,981	1,803,000	감) 267,981
	계	22,780,800	19,833,000	감) 2,947,800

Ⅲ		조치계획

설계변경 시행

○ 도림천복개(좌안)보수공사에서 발생된 건설폐기물 처리 변동사항으로 보

고 내용과 같이 설계변경(정산) 시행코자 함.

향후계획

○ 2015. 12. 18 : 설계변경 시행

○ 2015. 12. 21 : 변경계약 및 준공계 접수

○ 2015. 12. 22 : 준공검사조서 통보 (시설보수과→관리단속과)

따로붙임  설계변경내역서 1부.  끝.