문서번호	기전과-9056
결재일자	2015.12.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	기전과장	성동도로사업소장
차준원	문준호	최주용	12/18 이종엽
협 조
	관리단속과장		代이민호
	주무관		이명호

『2015년 교통사고 잦은곳개선 교통안전표지공사(군자역외2개소)』

설계변경 검토 보고

2015.12

성동도로사업소

(기 전 과)

『2015년 교통사고 잦은곳개선 교통안전표지공사(군자역외2개소)』

설계변경 검토 보고

「2015년 교통사고 잦은곳개선 교통안전표지공사(군자역외2개소)에 대한 예산의 효율적 사용을 위하여 설계변경을 추진하고자 합니다.

관련근거

○ ㈜라텍이엔지 라텍 제2015-126호 : 설계변경으로 인한 계약변경 요청

○ ㈜라텍이엔지 라텍 제2015-125호 : 실정보고 제출

공사개요

구 분	2015년 교통사고 잦은곳개선 교통안전표지공사(군자교외2개소)	비고
공사기간	‘15.11.23 ~ ’15.12.31
도 급 자	㈜라텍이에지 대표 정재금
도 급 비	13,272,600원

설계변경 현황

○ 설계변경 사유

- 당초 설계도서와 현장여건의 상이한 부분을 현장여건에 맞게

적용하여 설계변경 하고자 함.

○ 주요공종 변경내용

공사장소	실정보고내용	감리의견	검토결과	변경예상금액	비고
군자교	표지판(129) 2개 기설치되어 있음	과속방지턱 표지 2개 물량 삭제	현장 여건에 맞게 과속방지턱 표지 2개 삭제하고 물량 변경하여 시공함이 타당함	감) 368,300
중곡주유소	일방통행 미설치 구간 표지판(326) 3개 삭제	일방통행 표지 3개 물량 삭제	현장 여건에 맞게 일방통행 표지 3개 삭제하고 물량 변경하여 시공함이 타당함	감) 285,876
청계8가	신호지주 미 이설로 교통안전표지(고소용) 이설 불가	교통안전표지(고소용) 이설 물량 삭제	현장 여건에 맞게 고소용표지 이설 삭제하고 물량 변경함이 타당함	감) 7,853
보험료정산	건강, 연금, 노인장기요양 보험료 물량 삭제	보험료 정산	현장여건에 맞게 보험료 정산하여 물량 변경함이 타당함	감) 70,372원

○ 도급비 변경내용

공 사 명	도 급 비		증감액	변경사유
	당초	변경
2015년 교통사고 잦은곳개선 교통안전표지공사(군자역외2개소)	13,272,600원	11,572,000원	감)1,700,600원	시공물량 변경

○ 예산과목

: 교통운영과, 도시교통체계 및 소통 개선, 교통소통 및 안전관리 강화,

교통사고 잦은 곳 개선, 시설비(401-01)

조치의견

○ 상기와 같이「2015년 교통사고 잦은곳개선 교통안전표지공사(군자역      외2개소)」에 대하여 설계변경하여 공사추진에 만전을 기하고자 합니다.

붙    임 : 1. 설계변경서 및 내역서 1부.

2. 실정보고 및 합의각서 1부. 끝.