투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(실정보고 승인 알림)

1. 업무지시현장 : 도시고속도로 연결램프(정릉길) 설치공사 극동엔지니어링(주), 도시고속도로 연결램프(정릉길) 설치공사 풍림산업 주식회사

2. 작 성 일 자 : 2015.12.18.

3. 지 시 내 용

가. 극감정릉 제15-209(2015.11.19.)·210(2015.11.23.)·212(2015. 11.23.)·213(2015.11.23.)·214(2015.11.23.)·224(2015.12.4.)·231(2015.12. 11.)·230(2015.12.11.)호와 관련입니다.

나. 위 호와 관련하여 도시고속도로 연결램프(정릉길)설치공사에 대한 실정보고한 사항에 대하여 승인하오니 책임건설사업관리기술자께서는 공사·안전관리에 차질이 없도록 추진하여 주시기 바랍니다.

가. 실정보고 승인사항 (승인)

1) 옹벽6구간 시공계획 변경 실정보고

2) 가시설 화타쐐기 스티프너 수량산출 오류정정 실정보고

3) H-Pile 이음반영 실정보고

4) 장애인 보도설치 및 철거 실정보고

5) 교각(P4) 및 옹벽 5,6 시공위한 현장여건 반영 실정보고

6) 기존 구조물깨기 수량산출 정정 및 추가 발생분 실정보고

7) 옹벽5구간 암선변경에 따른 H-Pile 천공길이 반영

8) 옹벽5,6구간 암판정 및 시공계획 변경으로 인한 수량조정보고.  끝

- 본 결재는 통합사업관리정보시스템 내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시 통합사업관리정보시스템을 이용하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

주무관							남덕희			도시고속도로과장					12/18 명경출
협조자
시행			토목부-27417									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 12층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-3708-8666						/전송			02-3708-2599					/	heedeok@seoul.go.kr												/	대시민공개