투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행(정산)-세종로 차도구간 일상유지보수공사

우리사업소에서 시행중인 2015년 세종로 차도구간 일상유지보수공사(연간단가)에 대하여 아래와 같이 설계변경(정산) 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2015년 세종로 차도구간 일상유지보수공사(연간단가)

나. 공사기간 : 2015. 04. 21 ~ 2015. 12. 31

다. 도 급 자 : ㈜자오건설  대표 이기완

라. 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분		당 초 금 액	변 경 금 액	증, 감
총 공 사 비		680,000,000	908,000,000	증)228,000,000
도급비	공 급 가 액	525,283,637	725,919,946	증)200,636,309
	부가 가치세	52,528,363	72,591,994	증) 20,063,631
	계	577,812,000	798,511,940	증)220,699,940
관 급 비		102,188,000	109,488,060	증) 7,300,060
이 전 비		-	-	-

마. 설계변경사유 : 돌포장 파손량 증가로 인한 추가 재배정 예산 사용

바. 예산과목 : 도로관리과, 도로시설물 관리, 도로 및 도로부속물 관리, 노후포장도로 정비공사, 시설비 및 부대비, 시설비

따로붙임  1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 합의각서 1부.   끝.

주무관	이화신		도로보수과장	이석재		북부도로사업소장	12/18 노영석
협조자	계약1팀장	김점선
시행	도로보수과-12574	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913 (번동)	/
전화	944-5433	/전송	945-5072	/	hwas44@seoul.go.kr	/	대시민공개