함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	서울특별시장(재무과장)
(경유)
제목	설계변경 및 준공기한 연기 시행 (당산동3가 393-2 ~ 당산동1가 309간 송배수관 정비공사)

우리사업소에서 시행중인 “당산동3가 393-2 ~ 당산동1가 309간 송배수관 정비공사”에 대하여 아래와 같이 설계변경 및 준공기한 연기를 계약의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다

가 . 공 사 명 : 당산동3가 393-2 ~ 당산동1가 309간 송배수관 정비공사

나. 수 급 자 : 부기건설 대표 오만택

다. 계약기간 : 2015.06.09. ~ 2015.12.30

라. 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비및부대비,

시설비(노후상수도관정비)

마. 설계변경사유 : 신규공종 및 현장여건에 따른 물량 증감

바. 설게변경금액

구 분	당초게약금액	변경계약금액	증·감
도급비	699,891,520	761,233,000	증) 61,341,480

사. 준공기한연기 : 당초 2015.06.09. ~ 2015.12.30

변경 2015.06.09. ~ 2016.04.30

아. 준공기한 연기사유 : 교통소통대책 허가지연 및 겨울철 도로굴착통제로 인한 공기부족

따로붙임 : 1) 설계변경 심의서 및 의결서 1부.

2) 합의서 1부.

3) 설계변경내역서 1부.

4) 준공기한 연기 보고서 1부. 끝.

	남부수도사업소장
주무관	권승계		주무관	최희권		시설관리과장	12/18 代고신석
협조자
시행	시설관리과-31642	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/
전화	3146-4609	/전송	3146-4639	/	su123456@seoul.go.kr	/	대시민공개