문서번호	시설보수과-10637
결재일자	2015.12.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	북부도로사업소장
최돈용		정재현	12/21 代정수현
협조

설 계 변 경(정산)  검 토 보 고

[2015년 건설폐기물 처리용역-북부]

2015. 12

북부도로사업소

시 설 보 수 과

설 계 변 경(정산)  검 토 보 고

(2015년 건설폐기물 처리용역-북부)

용역현황

용 역 명 : 2015년 건설폐기물 처리용역-북부

용역개요 : 폐콘크리트 운반 976.43㎥, 폐아스팔트 운반 1932.57㎥

폐콘크리트 처리 2,246.07ton 폐아스팔트 처리(무대처리)

용역기간 : 2015.03.24  ∼  12.31

용역금액 : 100,000,000원

용 역 사 : 우광개발(주) 대표 임태권

설계변경 사유

공사별 시공(정산)물량 증·감에 따른 변경

설계변경 내용

용역비 변경내역                                                                                                                         (단위:원)

구 분		당 초	변 경	증·감	비 고
총 역역비		100,000,000	93,293,000	감)6,707,000
용역비	공급가액	90,909,091	84,811,818	감)6,097,273
	부가세	9,090,909	8,481,182	감)609,727
	계	1,000,000,000	93,293,000	감)6,707,000

물량 변경 내역                                            (당초, 변경)

건설폐기물 운반		건설폐기물 처리
폐콘크리트	976.43㎥	폐콘크리트	2,246.07ton
폐콘크리트	934.61㎥	폐콘크리트	2,149.61ton
폐아스팔트	2,100.84㎥	폐아스팔트	4,937.720ton
폐아스팔트	1,932.57㎥	폐아스팔트	4,541.550ton
합계	3,077.27㎥	합계	7,183.79ton
	2,867.19㎥		6,691.16ton

※ 공사별 변경물량 내역서 참조

조치계획

상기 보고내용과 같이 설계변경(정산) 시행코자 함.

붙임 : 1. 설계변경(정산) 내역서 1부.  끝.