문서번호	방재시설부-17361
결재일자	2015.12.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	방재시설부장
고소영		김인숙	12/21 임춘근
협 조

- 경춘선 폐선부지 공원조성 건설사업관리용역(2,3단계) -

1차분 용역기간 연기 검토 보고

2015. 12.

도시기반시설본부

(방재시설부)

- 경춘선 폐선부지 공원조성 건설사업관리용역(2,3단계) -

1차분 용역기간 연기 검토 보고

경춘선 폐선부지 공원조성 건설사업관리용역(2,3단계, 전면책임)의 원활한 업무 수행을 위하여 1차분 용역기간 연기 요청에 대한 검토보고임 (PSC-2015-786(2015.12.18.)호 관련임

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 경춘선 폐선부지 공원조성 건설사업관리용역(2,3단계)(전면책임)

○ 과업위치 : 경춘선 폐선부지 공원조성 2,3단계 구간, 경춘철교정비

- 2단계 : 경춘철교~산업대3길 고가철교(L=1.1㎞)

- 3단계 : 육사삼거리~서울시계, 광운대역 주변(L=3.0㎞)

- 경춘철교 정비 L=176.5m

○ 내    용 : 공원조성(조경/토목/건축/전기/통신/폐기물처리용역 등) 건설사업관리

○ 용역기간 : 2015.04.13.~2017.6.10.(1차분 2015.12.31.)

○ 용 역 비 : 1,188,900천원(1차분 763,924천원)

○ 용 역 사 : ㈜선진엔지니어링, ㈜수성엔지니어링, ㈜진전기엔지니어링

□ 용역기간 연기 검토

○ 관련근거 및 내용

연번	내 용	관련근거	용역비변경(천원)	변경내용	비고
1	1차분 완수일자 변경	방재시설부-17143 (2015.12.17.)	변경없음	당초 : 2015.12.31. 변경 : 2016.07.31. (증213일)

○ 용역기간 연기사유

- 경춘철교 정비공사의 2015년 10월 15일 재착공에 따라 용역공정

계획에 변경 사유 발생

- 경춘철교 정비, 경춘선 폐선부지 공원조성(2단계) 및 3단계 공원조성

사업(설계단계 포함)의 원활한 용역수행을 위하여 건설사업관리기술자

배치조정 등 용역계획 기 변경함. [방재시설부-15351(2015.11.16.)]

- 용역계약일반조건 제16조(과업내용의 변경)에 의거 용역공정계획

변경에 따라 1차분 완수일자 변경 필요

□ 보고자 의견

○『경춘선 폐선부지 공원조성 건설사업관리용역(2,3단계)』의 용역계획 변경에 따른 1차분 용역기간 연기로 기 실정보고 승인사항으로, 용역기간 변경하여 건설사업관리용역 추진에 만전을 기하고자 함.

붙임  설계변경 요청서 1부.  끝.