함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	납품기한 변경 계약의뢰(중계1증압장 모터펌프 제작구매설치)

1. 우리사업소에서 시행중인 『중계1증압장 모터펌프 제작구매설치』건에 대하여 아래와 같이 계약변경 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 중계1증압장 모터펌프 제작구매설치

나. **************

다. *****************************

라. 계약일자 : 2015.12.18(금)

마. 납품기한(변경)

구 분	당 초	변 경	비 고
납품기한	2015.12.31(목)	2016.06.30(목)

바. 설계변경 사유 : 선행공정 토목사업 지연으로 절대 공기 부족

사. 예 산 과 목

- 자본지출,유형자산취득,구축물,시설비(21111)

붙임 : 1. 납품기한 연기 보고서 1부.

2. 합의서1부.  끝.

	시설관리과장
주무관	정희철		기전팀장	김충완		시설관리과장	12/21 代이문성
협조자
시행	시설관리과-21693	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913	/
전화	02-3416-3418	/전송	02-3146-3439	/	jhc01@seoul.go.kr	/	부분공개(5)