함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	행정지원과장
(경유)
제 목	납품기한 연기 의뢰(중계1증압장 원격감시제어반 제작구매설치)

우리사업소에서 시행중인 중계1증압장 원격감시제어반 제작구매설치 계약건에 대하여 납품기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 건    명 : 중계1증압장 원격감시제어반 제작구매설치

2. 계 약 자 : ****************

3. 계약금액 : ************************

4. 납품기한(변경)

- 당초 : 2015.12.31

- 변경 : 2016.06.30

5. 귀책사유 : 북부수도사업소(지체상금 미부과)

붙임 1. 납품연기 보고서 1부.

2. 합의서 1부.  끝.

	시설관리과장
★주무관	배용우		기전팀장	김충완		시설관리과장	12/21 代이문성
협조자
시행	시설관리과-21695	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913	/
전화	3146-3416	/전송	3146-3439	/	qodyddn@seoul.go.kr	/	부분공개(6)