투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울대공원
수신	수신자참조
(경유)
제목	공사중지 통보

1. 귀사와 계약체결하여 시행하고 있는 『백두산호랑이숲 조성공사』에 대하여 전문가자문에 따른 추가 검토와 동절기 기온강하 등의 사유로 공사중지 통보하오니,

2. 현장 및 주변을 정리하여 관람객 이용에 불편이 없도록하고, 공사재착공시까지 안전사고예방 등 현장관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 백두산호랑이숲 조성공사

나. 지시사항 : 공사중지

다. 중지사유 : 전문가자문에 따른 추가검토 및 보완 필요, 동절기 기온 강하

라. 공사 중지기간 : 2014. 1. 17 ~ 별도지시까지

※ 공사 재착공 일정은 기상 상태에 따라 추후 조정통보.  끝.

							서울대공원장
수신자					미래종합조경(주) 주정수,(주)신영그린시스 심재홍
주무관							조진성			주무관					윤희숙					조경과장					01/17 이성주
협조자
시행			조경과-294									(						)		접수											(						)
우	427-702					경기도 과천시 대공원광장로(막계동) 102															/			http://grandpark.seoul.go.kr/
전화		02)500-7511						/전송			02)500-7993					/	jsjo@seoul.go.kr												/	대시민공개