투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경(2차 최종정산) 시행 - 2015년 교통 및 도로부속물 유지보수공사(연간단가)

우리사업소에서 시행중인 『2015년 교통 및 도로부속물 유지보수공사(연간단가)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(2차 최종정산)을 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2015년 교통 및 도로부속물 유지보수공사(연간단가)

나. 공사기간 : 2015. 3. 13 ~ 2015. 12. 31

다. 계약금액 : 금124,018,103원

라. 도 급 자 : 우제이건설㈜ 대표 이 관 성

마. 설계변경사유

- 민원처리, 교통사고 예방, 쾌적한 교통환경 조성을 위한 세척 등을 완료하고 실 시공 수량에 의한 공종별 물량 증․감에 따른 정산

- 도로보수과-4941(소장님 방침, 2015.11.10.)호 「아차산로 중앙분리대 설치 추진계획」에 의거 효율적인 업무추진을 위하여 연간단가에서 중앙분리대 설치에 따른 공사금액 증액발생

바. 변경내역                                             (단위 : 원)

공 종	금 액(원)			비 고
	당 초	변 경	증 ․ 감
계	124,018, 103	389,592,680	증 265,574,577
도급비	124,018,103	157,330,000	증 33,311,897
관급비	0	232,262,680	증232,262,680
이전비	0	0	0

사. 예산과목

- 도시교통체계및소통개선, 교통안전시설물 관리, 교통안전관련 도로부속물 설치, 시설비

- 도로시설물 설치, 도로 및 도로부속물 관리, 도로부속물 일상유지관리, 시설비

- 도로시설물 관리, 도로 및 도로부속물 관리, 차량방호울타리 및 중앙분리대 정비사업, 시설비(금35,475,000원)

- 도시교통체계및소통개선, 교통소통 및 안전관리강화, 교통 사망사고 줄이기 사업, 시설비(금1,475,000원)

붙임 : 1, 설계변경 검토보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.   끝.

주무관	이기영		도로보수과장	국중진		성동도로사업소장	12/21 이종엽
협조자	계약1팀장	김점선
시행	도로보수과-5838	(		)	접수		(		)
우	04807	서울특별시 성동구 자동차시장길 41	/
전화	2210-1538	/전송	2210-1549	/		/	부분공개(7)