함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경(2차) 시행 (2015년 구로,양천구 관내 시설물 설치 및 보수공사)

우리사업소에서 시행중인 『2015년 구로,양천구 관내 상수도시설물 설치 및 보수 공사(장기계속단가)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(2차)을 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2015년 구로,양천구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(장기계속단가)

나. 공사기간 : 2015. 5. 8. 〜 2016. 4. 30.

다. 도 급 자 : **************

라. 설계변경 사유 : 신규공종 발생 및 물량 증 ․ 감

마. 예산과목 : 자본적지출, 가동설비자산, 구축물, 시설비

상수도사업비, 영업비용, 배급수비, 기타교체비

바. 설계변경 내역                                                    (단위 : 원)

구 분	총부기금액	1차수 부기금액 (2015년도)		2차수 부기금액 (2016년도)		비고
		당초금액	변경금액	당초금액	변경금액
총공사비	1,011,736,990	720,076,000	512,726,000	291,660,990	499,010,990
도급비	644,046,990	517,847,000	310,497,000	126,199,990	333,549,990
관급자재비	217,690,000	119,729,000	119,729,000	97,961,000	97,961,000
도로굴착비및기타	150,000,000	82,500,000	82,500,000	67,500,000	67,500,000

따로붙임 : 1. 설계변경계획(2차) 및 설계변경 심의위원회 개최결과 각 1부.

2.  설계변경 내역서 1부.

3. 설계변경 심의 결과서 1부.

4. 합의서 1부. 끝.

주무관	김효경		주무관	김남구		급수운영과장	조면행		강서수도사업소장	12/21 이상래
협조자	행정관리팀장	손창두
시행	급수운영과-31835	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	02-3146-3958	/전송	02-3146-3989	/	khk1189@seoul.go.kr	/	부분공개(6)