문서번호	도로보수과-5834
결재일자	2015.12.21.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	성동도로사업소장
이기영		국중진	12/21 이종엽
협조

설계변경(최종정산) 검토보고

2015년 교통 및 도로부속물 유지보수공사(연간단가)

2015. 12. 21

성동도로사업소

(도로보수과)

설계변경(최종정산) 검토보고

2015년 교통 및 도로부속물 유지보수공사(연간단가)

민원처리 및 교통사고 예방을 위한 중앙분리대․시선유도봉 등 설치, 꽤적한 교통환경 조성을 위한 도로부속물 세척 등을 완료하고 실 시공 수량으로 정산처리하고자 함.

▢ 공사개요

○ 공 사 명 : 2015년 교통 및 도로부속물 유지보수공사(연간단가)

○ 규    모 : 개방형중앙분리대 150경간, 방호울타리 세척 7,330㎡

하수관 세정 1,504m, 미끄럼방지포장(그루빙) 1,782㎡

○ 계약금액 : 금124,018,013원

○ 계 약 자 : ㈜우제이건설 대표 이 관 성

○ 공사기간 : 2015. 3. 13 ~ 2015. 12. 31

○ 공 정 률 : 100%

▢ 변경사유

○ 민원처리, 교통사고 예방, 쾌적한 교통환경 조성을 위한 세척 등을 완료하고 실 시공 수량에 의한 공종별 물량 증․감에 따른 정산

○ 도로보수과-4941(소장님 방침, 2015.11.10.)호 「아차산로 중앙분리대 설치 추진계획」에 의거 효율적인 업무추진을 위하여 연간단가에서 중앙분리대 설치에 따른 공사금액 증액발생

▢ 설계변경내용

○ 주요공종 물량 변경

공 종	규 격	단위	수 량			비 고
			당 초	변 경	증 ․ 감
소 계			7,742	12,726	증 4,984
시선유도봉 철거		개	1	110	증 109	도로보수과-3910(09.14) 용마산로 중앙분리대 설치검토
방호울타리 세척		㎡	7,330	11,132	증 3,802	하반기 도로시설물 세척계획 (시설보수과)

공 종	규 격	단위	수 량			비 고
			당 초	변 경	증 ․ 감
개방형중앙분리대	설치	경간	150	511	증 361	도로보수과-4941(11.10) 아차산로 중앙분리대 설치
단부설치		개소	60	200	증 140	“
기존 휀스철거		경간	120	618	증 498	“
쏠라표지병 설치		개	35	0	감 35
시선유도봉 설치	200*450	개	1	45	증 44	교통사고 잦은곳 개선사업
시선유도봉 설치	250*750	개	45	110	증 65	민원사항 처리

○ 변경금액

공 종	금 액(원)			비 고
	당 초	변 경	증 ․ 감
계	124,018, 120	389,592,680	증 265,574,560
도급비	124,018,120	157,330,000	증 33,311,880
관급비	0	232,262,680	증 232,262,680
이전비	0	0	0

▢ 예산과목

○ 도시교통체계및소통개선, 교통안전시설물 관리, 교통안전관련 도로부속물 설치, 시설비

○ 도로시설물 설치, 도로 및 도로부속물 관리, 도로부속물 일상유지관리, 시설비

○ 도로시설물 관리, 도로 및 도로부속물 관리, 차량방호울타리 및 중앙분리대 정비사업, 시설비(금35,475,000원)

○ 도시교통체계및소통개선, 교통소통 및 안전관리강화, 교통사고 잦은곳 개선사업, 시설비(금1,475,000원)

▢ 조치의견

○ 상기 보고내용과 같이 공종별 실시공 물량으로 정산설계변경을 시행하여 교통 및 도로부속물 유지관리업무에 만전을 기하고자 함.

첨  부 : 1. 설계변경내역서 1부

2. 제비율검증결과 1부.  끝.