투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	설계용역 준공기한 연기 요청 (대청지하차도 설치공사 실시설계)

1. 재무과-40966호(2015. 8.18.)와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행 중인 『대청지하차도 설치공사 실시설계용역』에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 대청지하차도 설치공사 실시설계용역

나. 용역개요

- 대청지하차도 설치   : 폭4차로, 연장440m

- 일원보도육교 재설치 : 폭3.0m, 연장44.8m

다. 계 약 자 : ㈜경동엔지니어링, ㈜동해종합기술공사, ㈜삼안

라. 변경계약 내역

구 분	당 초	변 경	증 / 감	비 고
계약금액	857,379,000원	857,379,000원	-	내역변경 없음
계약기간	2014.10. 6. ~ 2015.12.31.	2014.10. 6. ~ 2016. 5.31.	증)5개월

마. 예산과목 : 도로건설, 도시고속도로망 확충(도시개발특별회계), 강남순환도시고속도로, 시설비 및 부대비, 시설비

바. 귀책소재 및 연기사유

- 연기에 따른 귀책소재 : 도급자에 있지 않음

- 지체상금 부과여부 : 미부과

- 연기사유 : 지하차도 신설에 따른 양재대로 최적 선형 검토 등으로 설계기간 부족

붙임 : 1. 준공기한 연기 보고서 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	정문수		토목설계과장	이승우		토목부장	전결 12/21 代서관석
협조자	계약2팀장	홍연화
시행	토목부-27601	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로8 (무교동) 프리미어플레이스 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2590	/전송	02-3708-2599	/	msjeong13@seoul.go.kr	/	대시민공개