문서번호	기전과-9091
결재일자	2015.12.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	기전과장	성동도로사업소장
차준원	문준호	최주용	12/21 이종엽
협 조
	관리단속과장		代이민호
	주무관		이명호

『2015년 교통안전표지 유지보수공사』

설계변경 검토 보고

2015.12

성동도로사업소

(기 전 과)

『2015년 교통안전표지 유지보수공사』

설계변경 검토 보고

「2015년 교통안전표지 유지보수공사」에 대한 예산의 효율적 사용을 위하여 설계변경을 추진하고자 합니다.

관련근거

○ ㈜영호이앤씨 영호 본 2015-273 : 설계변경 제출

공사개요

구 분	2015년 교통안전표지 유지보수공사	비고
공사기간	‘15.03.18 ~ ’15.12.31
도 급 자	주식회사 대상에프앤씨
도 급 비	56,494,100원
감 리 사	㈜영호이앤씨

설계변경 현황

○ 설계변경 사유

- 작업지시중 공사 물량의 증,감에 따른 설계변경

○ 도급비 변경내용

공 사 명	도 급 비		증감액	변경사유
	당초	변경
2015년 교통안전표지 유지보수공사	56,494,100원	62,948,000원	증)6,453,900원	시공물량 변경

○ 주요공종 변경내용

연번	공 종	수량		증감	비고
		당초	변경
1	교통표지판 신설	44	310	증)266
2	교통표지판 교체	43	38	감)5
3	교통표지판 철거	51	69	증)18
4	T형 부착대 및 교차로대	54	132	증)78
5	철주 및 편주	55	163	증)108
6	도장 및 방향위치조정	5	0	감)5
합계		252	712	증)460

○ 예산과목

- 교통운영과, 도시교통체계 및 소통 개선, 교통안전시설물관리,

교통안전표지 설치 및 개선, 시설비

조치의견

○ 상기와 같이 2015년 교통안전표지 유지보수공사에 대하여 설계변경        하여 공사추진에 만전을 기하고자 합니다.

붙    임 : 1. 설계변경서 제출 1부.

2. 내역서 및 합의각서 1부.

3. 제비율 검증 1부. 끝.