함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	설계변경 계약의뢰[상수도공사(급수,누수,시설물) 강남지역 건설사업관리용역(장기계속단가계약)〕

우리 본부에서 시행중인 『상수도공사(급수,누수,시설물) 강남지역 건설사업관리 용역(장기계속단가계약)』 에 대하여 아래와 같이 설계변경 및 차수별 계약금액을 변경계약 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 용 역 명 : 상수도공사(급수,누수,시설물) 강남지역 건설사업관리용역(장기계속단가계약)

2. 용역기간 : ‘15. 6. 22.~12. 31. (총 용역기간 : ’15. 6. 22.~‘17. 6. 21.)

3. 예산과목 : 상수도사업비,영업비용,급수공사비,신설공사비,감리비

상수도사업비,영업비용,배급수비,수선유지교체비(누수,불용관 감리비)

구축물,시설비및부대비,감리비(시설물)

4. 계 약 자 : ㈜이준엔지니어링 대표 이방열 등 2개사

5. 변경내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감
총부기 금액	4,106,329,000	4,106,329,000	-
1차수 금액 (‘15. 6. 22.~12. 31.)	1,198,549,000	1,077,395,000	감 121,154,000원
2차수 금액 (‘16. 1. 1.~12. 31.)	2,053,733,000	2,053,733,000	-
3차수 금액 (‘17. 1. 1.~6. 21.)	854,047,000	975,201,000	증 121,154,000원

6. 설계변경 사유 : 1차분 용역금액 산정 시 7개월로 산정하여 5, 6월달 근무일수(14일) 추가 산정됨.

붙임 : 1. 설계변경 및 차수별 금액 변경 시행 1부.

2. 설계변경 심의 위원회 개최 결과 보고 1부.

3. 설계변경 내역서 1부.

4. 변경 합의서 1부.  끝

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	노경철		누수방지과장	김영삼		시설안전부장	12/21 강신재
협조자
시행	누수방지과-10951	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 시설안전부	/
전화	3146-1520	/전송	3146-1529	/	shrudcjf07@seoul.go.kr	/	대시민공개