문서번호	정수과-5488
결재일자	2015.12.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	정수과장
서홍교	12/21 윤맹진

- 2015년 정수처리시설 청소 및 준설용역 -

설계변경 심의 결과보고

2015.12.

암사아리수정수센터

(정  수  과)

- 정수처리시설 청소 및 준설용역 -

설계변경 심의 결과보고

정수처리시설 청소용역에 대한 설계변경 사항이 발생하여 설계변경 심의회를 개최하고 그 결과를 보고드림.

⃞ 사업개요

○ 용 역 명 : 2015년 정수처리시설 청소 및 준설용역

○ 용역기간 : 2015.03.13. ~ 2015.12.23.

○ 계약금액 : 금192,656,150원

○ 용역업체 : 세계산업[대표 - 구성숙, 소재지 - 서울시 성북구]

⃞ 설계변경 사유

○ 현장상황에 따라 계약물량과 시공물량 일부 공종에 증감이 발생

- 원활한 정수처리시설 청소를 위해 설계에 반영되어 있지 않은 1정수장 배슬러지지 청소 실시

시설물 명칭	단위	물량내역		증감	사유
		당초	변경
주벽청소 (침전지, 여과지,기타)	㎡	258,004	254,409	(감) 3,595	- 배슬러지지 추가, 응집침전지 감량
정수지	㎡	52,522	52,522	-
토사 걷기 및 싣기	㎡	133	-	(감) 133	- 배슬러지지 청소를 위해 회수조 청소 미실시
준설토 운반	㎡	133	-	(감) 133	- 회수조 청소 미실시
밸브 개폐	회	79	70	(감) 9	- 전동밸브 교체 및 응집침전지 감량
상등수 이송펌프 설치	회	64	58	(감) 6	- 응집침전지 감량
상등수 이송펌프 운전	회	68	66	(감) 2	- 응집침전지 감량
가설창고	개월	12	9	(감)3	청소기간 반영

○ 각종 보험료 정산에 따른 설계 변경 필요

⃞ 설계변경 내역

○ 용역금액 변경 : 감14,150,150원

구 분		금 액		증감	비고
		당 초	변 경
총용역비		192,656,150	178,506,000	(감)14,150,150
도급액	공급가액	179,141,955	162,279,000	(감)12,862,955
	부 가 세	17,914,195	16,227,000	(감)1,287,195
	계	192,656,150	178,506,000	(감)14,150,150

⃞ 심의회 개최 결과

○ 심의일시 : ‘15.12.21(월) 16:30~17:00

○ 심의위원 : 정수과장, 박석민, 김상현, 김재홍, 백석현 주무관

○ 심의결과 : 원안가결

- 설계변경의 타당성 : 타당함

- 계약변동(증감) 물량 및 계약단가 적정 적용여부 : 적정

- 제경비 적정 산정 및 적용 적정성 : 적정

- 각종 제반규정 준수여부 : 준수

⃞ 조치의견

○ 심의결과를 반영하여 설계변경 시행

붙임 : 설계변경 심의의견서 및 설계변경 내역서 각 1부. 끝.