투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	관리과장
(경유)
제 목	변경계약의뢰(청계천 하류횡단 건설폐기물)

1. 물재생과-8601(2015.12.21)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 『청계천 하류횡단 차집관거 건설폐기물 처리용역』에 대하여 아래와 같이 변경계약을 의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 청계천 하류횡단 차집관거 건설폐기물 처리용역

나. 용역개요 : 폐아스콘 133톤, 폐콘크리트 5,998톤 운반 처리

다. 용역기간 : ‘15.03.12~’15.12.31

라. 용 역 비 : 161,202천원

마. 도 급 자 : (유)도성개발 대표 윤칠중

바. 설계변경현황

□ 사업비 변경현황

구 분		당 초	변 경	증 감	비 고
총공사비		161,202,000	182,918,000	증 21,716,000
도급비	공급가액	146,547,273	166,289,091	증 19,741,818
	부 가 세	14,654,727	16,628,909	증 1,974,182
	계	161,202,000	182,918,000	증 21,716,000

□ 변경사유 : 살곶이 공원 앞 기존 차집관로 보호 콘크리트 수량증가

- 운반 : 폐아스콘 57㎥ ⇒ 37㎥, 폐콘크리트 2,608㎥ ⇒ 2,988㎥

- 처리 : 폐아스콘 133톤 ⇒ 88톤, 폐콘크리트 5,998톤 ⇒ 6,874톤

사. 예산과목 : 변경없음

붙임 : 1. 방침서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.    끝.

	물재생과장
주무관	최승룡		물재생과장	12/21 강병수
협조자
시행	물재생과-8606	(		)	접수		(		)
우	04809	성동구 자동차3길 64	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2572	/전송	02-2211-2579	/	csy21@seoul.go.kr	/	대시민공개