투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	설계변경 계약의뢰(2015년 관내포장도로 불량맨홀정비공사-연간단가)

우리사업소에서 시행중인 『2015년 관내포장도로 불량맨홀정비공사(연간단가) 』에 대하여 아래와 같이 설계변경(3차 최종)을 실시하였기에 계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2015년 관내포장도로 불량맨홀정비공사(연간단가)

나. 공사기간 : 2015. 5 .26 ~ 2015. 12. 31.

다. 계약금액 : 575,000,000원

라. 도 급 자 : ㈜평강산업개발  대표 변 문 수

마. 설계변경사유

- 공종별 물량 정산

- 제경비(국민건강보험료,노인장기요양보험료,국민연금보험료,환경보전비)정산

바. 설계변경내역

- 공사비 변경                                         (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증, 감	비 고
총공사비	580,000,000	576,490,000	감) 3,510,000
도 급 비	575,000,000	576,490,000	증) 1,490,000
이 설 비	5,000,000	-	감) 5,000,000

사. 예산과목

- 도로시설물관리, 도로및도로부속물관리(도시개발), 노후포장도로정비공사, 시설비(품의번호 33)

붙임 : 1. 설계변경 검토보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 제비율 검증결과 자료 1부.

4. 설계변경 시행 방침. 1부.  끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
주무관	김용면		도로보수과장	12/21 국중진
협조자
시행	도로보수과-5842	(		)	접수		(		)
우			/
전화	2210-1566	/전송	02)2210-1549	/		/	대시민공개